문서번호	기반시설과-1132
결재일자	2020.4.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기반시설과장
김일문		04/03 라철흠
협 조

성수대교북단외2개소승강기설치공사

(성수대교남단 계단실측 실정보고)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 04.  .

한강사업본부 기반시설과

-성수대교북단외2개소 승강기설치공사-

(성수대교남단 계단실측 실정보고)

성수대교남단 계단시공중 현장실측 및 상세 도면작성 결과 계단의 규격 변경에 대한 검토보고임. ⇒ 한강제2020-0014호(2020.4.2.)

Ⅰ		공사개요

❍ 공 사 명 : 성수대교북단외2개소 승강시설치공사(장기계속)

❍ 공사개요

- 도급비 : 3.244.489천원

- 관급비 : 60,702천원천원

- 기 타 : 616,257천원(전기,기계)

❍ 공사기간 :‘19. 11.4 ~ ‘20.12.20

❍ 시 공 사 : 명남종합건설외외1개사 대표 박남재

Ⅱ		당초설계 현황 및 문제점

❍ 당초설계

‐ 성수대교남단 계단중 1~4단 폭 300mm 높이 150mm, 5~6단은 폭270mm    높이 160mm 최하단 구간인 7단은 폭 260mm 높이 180mm의 3가지 Type으로 설계되어 있음

❍ 문제점

‐ 당초설계대로 시공시 계단 높이와 폭이 일정치 않음에 따라 준공후 공용시 이용자들의 불편초래 예상

Ⅲ		시공사 실정보고내용

❍ 기초시공후 계단제작을 위하여 실측하고 SHOP-DWG 실시한바 1~6단 구간을 폭 280mm 높이 169.56mm로 시공이 가능 하고 7단은 폭 260mm 높이 169.56mm로 시공하여 전구간 계단높이를 동일규격으로 시공하여 이용 편의도모

Ⅳ		검 토 사 항

❍ 관련규정 검토한바 적정함

- 서울시 시설물 설계․시공 및 유지관리 편람(소규모강교 및 보도육교)

⇒ 폭 : 300~260mm, 높이 150mm~180mm

- 건축물의 피난·방화구조등의 기준에관한 규칙

Ⅴ		조치사항

❍ 시공사 실정보고 검토한바 기준에 적합하고 시민이용 안전상 유리할 것으로 판단되어 변경시공 승인코자 함.

1~6단(상부측) : 폭280mm 높이 169.56mm

7단(지면하부) : 폭 260mm 높이 169.56mm

붙임 : 시공사 실정보고 1부. 끝.