문서번호	치수과-1484
결재일자	2020.4.8.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	치수과장	시설부장
방호익	손창열	04/08 전영주

- 한강준설〔저수로〕정비공사 -

현 안 사 항 실 정 보 고

2020. 04.  .

- 한강준설〔저수로〕정비공사 -

현 안 사 항 실 정 보 고

□ 공 사 개 요

○ 공   사   명 : 한강준설(저수로) 정비공사

○ 공  사  규  모 : 저수로 준설 36,240㎥, 사토운반 36,240㎥

○ 공  사  기  간 : 2020.3.23. ~ 2020.11.17.

○ 도   급   액 : 1,534,900천원

○ 시   공   사 : 관악산업(주)

○ 건설사업관리 : ㈜서우티이씨

□ 한강갑문 입구 준설 요청

○ 관련근거 : 수상안전과-798호(2020.3.3.)

○ 요청내용

- 수상안전과에서 경인 아라뱃길 한강갑분 입구에 퇴적물이 쌓여 관공선(선박) 통행시 안전사고 우려로 인하여 반복민원이 발생되는 바, 한강에서 선박의 안전성 확보를 위하여 준설작업을 요청함

□ 건설사업관리자 보고내용

○ 관련근거 : 서우-건설관리 2020-003호(2020.04.01.)

○ 보고내용 : 아라뱃길 한강갑문 합류지점 준설 협조 요청에 따른 검토보고

- 수심측량 결과 아라뱃길 한강갑문 주변 수심은 0.8~2.5m 정도의 수심을 보이고 있는 것으로 조사

- 한강갑문에서 한강본류방향 주운수로(280m) 구간에 토사가 퇴적되어 보통 선박의 흘수가 1.0m~2.0m인 점을 감안 할 때 운항시 하상에 접촉되어 안전사고가 발생할 여건을 가지고 있는 실정으로 계획수심인 3.0m로 준설하여 선박의 안전성을 확보하고자 함

한강갑문 입구	한강갑문 입구 준설구역

□ 준설량 및 계획하상고 산정교

구분	준설계획고(m)	준설량(㎥)		증․감	비 고
		당초	변경
아라뱃길 한강갑분	3.0	0	11,000	증) 11,000	선박안전운항 최소 수심 적용

□ 조치의견(조치계획)

○ 책임 건설사업관리자의 실정보고 내용과 같이 원활하고 신속한 공사 추진을 위해 아라뱃길 한강갑문 합류부 주변 준설작업을 승인하고, 설계변경시 반영코자 함.

붙임  1. 관련 문서 1부.

2. 건설사업관리자 실정보고 서류 1부.  끝.