문서번호	시설보수과-1956
결재일자	2020.4.8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	남부도로사업소장
신동헌		代신동헌	04/08 변봉섭
협 조

2020년 봉천천복개 보수공사 발주계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 4.

남부도로사업소

(시설보수과)

2020년 봉천천복개 보수공사 발주계획 보고

’19년 봉천천복개 정밀안전진단 결과 시설물 손상(민원)에 대한

구조물의 안전성 확보를 위한 보수 공사 발주 계획임

□ 관련근거

○ 2020년 봉천천복개 보수공사 계약심사(계약심사과-6897호, ’20.4.2.)

□ 시설물 현황

시설물명	종별	위 치	준공 년도	규 모	구 조	설계 하중	상태 등급
봉천천복개	1종	원당초교 ~ 보라매고가	1988	B=30~45.1m L=3,733m	박스 라멘	DB-24	B

□ 사업개요

○ 공 사 명 : 2020년 봉천천복개 보수공사

○ 공사개요

*****************************************

○ 공사기간 : 2020. 4. ~ 2020. 10.

○ 예 산 액 : ***********

□ 추진현황

○ ’19. 3.~12.: 정밀안전진단 시행

○ ’20. 3. 19. : 특정기술 선정심사위원회 개최

○ ’20. 4.     : 계약심사 및 전문공사 발주사업 사전검토

○ ’20. 4.  8. : 예산재배정 요청

□ 사업비 집행계획

(단위:천원)

총공사비	도급비	관급비	이전비	비 고
*******	*******	******	******

□ 발주계획

◯ 정밀안전진단 주요 지적 및 민원사항에 대하여 예산범위내 보수

공사 시행

◯ 입찰방법 : 제한경쟁입찰(지역제한)

- 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 제20조

◯ 입찰참가 자격

- 건설산업기본법에 의한 시설물유지관리업에 등록한업체로서, 입찰

공고일 전일부터 입찰일(낙찰자는 계약체결일)까지 주된 영업소가

서울특별시에 소재한 업체

◯ 하자담보책임기간

- 건설산업기본법 시행령 제30조 관련 별표4에 의함

◯ 신기술 및 특허공법 입찰공고문 명기

****************************************

*****************

□ 향후계획

◯ ’20.  4. : 공사발주

◯ ’20.  4. : 공사계약 및 착수

◯ ’20. 10. : 공사완료

붙임 1) 계약심사 결과 공문 1부.

2) 신기술‧특허 사용협약서 2부. 끝.