문서번호	도로보수과-3580
결재일자	2020.4.8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	도로보수과장
이석연		代박해웅	전결 04/08 양기승
협조

「2020년 도로·교통안전부속물 유지보수공사」 건설폐기물 운반 및 처리용역 발주계획

2020. 4.

동부도로사업소

(도로보수과)

「2020년 도로·교통안전부속물 유지보수공사」 건설폐기물 운반 및 처리용역 발주계획

우리사업소에서 시행 중인 『2019년 도로·교통안전부속물 유지보수공사』에서 발생하는 건설폐기물을 적기에 처리하기 위해 발주방법을 검토하여 보고 드림

1		관련 근거

2020년 도로·교통안전부속물 유지보수공사(연간단가) 추진계획【도로보수과-1888(2020.2.26.)호】

2		공사 개요

공 사 명: 2020년 도로·교통안전부속물 유지보수공사

공 사 비: 593,449천원(도급:355,369/관급:184,840/이전:53,240)

공사기간: 2020. 3. 20. ~ 12. 20.

공사구간: 관내(강남구, 송파구, 강동구, 서초구일부)

공사내역:

○ 미끄럼방지포장 2,993㎡, 중앙분리대설치 816m(272경간),  시설물세척 8,613㎡, 중앙분리대연석 도색 300㎡,  도로표지병 설치 및 철거 600개, 시선유도봉 설치 및 제거 590개, 기타 부대공 1식 등

폐기물 발생 형태: 폐아스콘(덩어리) 및 폐콘크리트

3		건설폐기물 처리용역 발주계획

용역개요

○ 용 역 명: 2020년 도로·교통안전부속물 유지보수공사 건설폐기물 운반 및 처리용역

○ 용역기간: 착공일로부터 2020.12.20.까지

○ 용역내용: 건설폐기물 운반 및 처리 680톤

- 건설폐기물 발생량이 분리 발주 대상(100톤 이상)에 해당

※ 근거: 건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 제15조 제1항 및 동법 시행령 제11조

용역시행 계획

○ 계약방법: 수의계약

- 법적근거: 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제 25조 5항 나목

※ 추정가격 1천5백만원 이하(市-재무과, 2017 수의계약 제도 개선계획)

- 수의계약 사유: 추정가격 1천5백만원 이하의 소액으로 「2020년 도로·교통안전부속물 유지보수공사」에서 발생하는 건설폐기물을 신속하고 적법하게 운반 및 처리하고자 함

○ 계약대상: ***************

- 선정사유: 면허자격을 갖춘 업체 중 저가 견적 업체로 선정

※ 면허자격: 「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법령」에 의거 건설폐기물의 수집․운반업 및 건설폐기물 중간처리업을 모두 등록한 업체

○ 소요예산: *********

- 2020년 도로·교통안전부속물 유지보수공사(연간단가) 이전비 활용

- 예산과목: 도로관리과, 도로시설물 관리, 도로 및 도로부속물 관리도로부속시설물 일상 유지관리, 시설비

4		추진일정

’20. 03. 20.: 2020년 도로·교통안전부속물 유지보수공사 착공

’20. 04. 08.: 용역 발주

’20. 04.     : 용역 계약 및 착수

’20. 12. 20.: 용역 준공

붙 임 1. 설계내역서 1부.

2. 산출기초조사서 1부 및 견적서 3부.  끝.