코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	계약변경 의뢰(휘경유수지 CSOs 저류조 설치 기본 및 실시설계 용역(장기 2차))

1. 물순환정책과-6781호(2020.4.7)와 관련입니다.

2. 우리부서에서 추진 중인 『휘경유수지 CSOs 저류조 설치 기본 및 실시 설계 용역(장기 2차)』에 대한 계약변경을 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 휘경유수지 CSOs 저류조 설치 기본 및 실시설계 용역(장기 2차)

나. 용역기간 : ‘20.1.1.~’20.4.13

다. 계약금액 : 금266,000,000원

라. 계 약 자 : ㈜제일엔지니어링종합건축사사무소, ㈜이산, ㈜대한콘설탄트

마. 변경내역 : 물량추가에 따른 계약금액 및 기간 변경

구 분		당 초	변 경	증․감
계약금액	총차	1,076,000,000원	1,108,000,000원	증)32,000,000원
	2차	266,000,000원	298,000,000원
계약기간	총차	‘19.4.15.∼’20.4.13	‘19.4.15.∼’21.5.31	증)414일
	2차	‘20.1.1.∼’20.4.13	‘20.1.1.∼’21.5.31

※ 세부내역 : 붙임 설계변경 내역서 참조

바. 변경사유 : 계약물량 추가(지반 및 토질조사비, 설계자문비) 및 사전 행정절차 이행 소요기간 반영으로 금액 및 기간 변경

사. 예산과목 : 물순환안전국, 물순환정책과, 깨끗한 물관리, 물환경 개선 및 관리,

휘경유수지 CSOs 저류조 설치, 시설비(설계비)

붙임 : 1. 용역 계약변경 검토 보고서(방침) 1부.

2. 설계변경 내역서(총차) 1부.

3. 설계변경 내역서(장기 2차) 1부

4. 합의각서 3부.

5. 과업기간 연장 실정보고서(도기본) 1부.

6. 용역 계약금액 조정 실정보고서(도기본)1부.

7. 관련요청 공문 2부. 끝.

	물순환정책과장
주무관	이근보		통합물관리팀장	조장환		물순환정책과장	04/08 임춘근
협조자	계약1팀장	代신충수
시행	물순환정책과-6824	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-1323	/전송	02-3146-1319	/		/	부분공개(5)