투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	공사 변경계약(공기연장) 알림[돈의문 박물관마을 수직정원 조성공사]

1. 총무부-6287(2020.04.06.)호와 관련입니다.

2.「돈의문 박물관마을 수직정원 조성공사」의 변경계약 현황을 아래와 같이

알려드리니, 공정관리에 만전을 기해 주시기 바랍니다.

< 변경계약 체결 현황 >

계약자	변경내용	비고
	계약기간
(유)연일종합조경 외 2개사	당초 : ‘19.11.11.~‘20.05.08. 변경 : ‘19.11.11.~‘20.06.18.

붙임   공사변경계약 체결 통보 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	서울시설공단이사장,엘림아키건축사사무소 대표 이종기,(유)연일종합조경 대표 성문정,건축부장,설비부장
주무관	김희숙		공원시설과장	이병호		방재시설부장	전결 04/08 박홍봉
협조자	주무관	손병도
시행	방재시설부-5205	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 14층 방재시설부	/
전화	02-3708-8683	/전송	02-3708-8756	/	khs2012@seoul.go.kr	/	대시민공개