문서번호	급수운영과-7061
결재일자	2020.4.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	급수운영팀장	급수운영과장
조은성	구자광	이문성	04/10 유승효

단 수 작 업 계 획 서

(중계동 원인자이설)

2020. 4.

북부수도사업소

(급수운영과)

단 수 작 업 계 획

(중계동 원인자이설)

※ 노원구청 치수과에서 시행중인「하계배수분구 하수관로 종합정비공사」관련 원인자 이설공사임.

□ 공사현황

- 공 사 명 : 하계배수분구 하수관로 종합정비공사 중 상수도 이설공사

- 공사개요 : *********************

- 시공회사 : ******************

□ 지역별 단수계획

작업구간	단수위치	단수예정일	단수시간	비고
***	******, ********	**************	*************	목련3단지아파트는 전세대 저수조(367ton)급수방식(2,670세대)

□ 공사배관 상세도

배관상세도	위치도

□ 단수소요시간

작 업 계 획	소요시간	비 고 (산출근거)
제수밸브개폐	40분	******************************* ******************************* ******************************* *******************************
기존관절단 및 퇴수	30분	*****************************
배관	1시간 30분	************************ ************************* ************************
세척 및 통수	20분	**********************
합 계	3시간

□ 자재준비계획

번호	품 명	규 격	단위	수량	비고
1	타이튼직관	300	본	1
2	KP소켓곡관	300*45	개	4
3	KP소켓프렌지T형관	300*80	개	1
4	KP이음관	300	개	4
5	이탈방지압륜	300	개	13
6	KP볼트	24*85	개	65
7	제수밸브	80	조	1
8	배기변	80	조	1
9	원형철개	648	조	1
10	KP소켓편락관	300*250	개	2

□ 장비확보계획

번호	장 비 명	규 격	단위	수 량	비 고
1	백호우	130W	대	1
2	백호우	60W	대	1
3	덤프	5TON	대	1
4	양수기	65㎜	대	3

□ 인력확보계획

연번	구분	성명	자격	인원수	비고
계				5
1	배관공	***	**
2	배관공	***	**
3	배관공	***	**
4	인 부	***
5	인 부	***

□ 수계조정 및 퇴수작업계획

○ 수계조정 계획 : 해당없음

○ 퇴수작업 계획

****************************************

******************************

□ 담당 및 시공업체 연락

구 분	책 임 자	전 화
담 당 (시행부서)	********************************** ***********************************	************ *************
업 체	**************** ************** **************	*************

□ 시험굴착계획 : 해당없음

□ 공사장에 대한 안내간판 및 안전시설 설치

□ 기타사항

○ 단수일시 : 2020. 4. 16(목)

○ 단수시간 : 13:00 ~ 16:00 (3시간)

○ 단수지역 : 상명초등학교, 목련3단지아파트

○ 단수세대 : 없음(저수조 만수위 확보)

단수 및 통수시 변류 조절계획

□ 밸브조절 위치도

□ 조절대상 및 담당자

〇 단  수

구 분	순서	위 치	규 격	수 량	이상유무	담당자
****	*	*********	*******	*	****	*******
****	*	*********	*******	*	****	*******
****	*	*********	*******	*	****	*******
****	*	*********	*******	*	****	*******

〇 통  수

구 분	순서	위 치	규 격	수 량	이상유무	담당자
****	*	*********	*******	*	****	*******
****	*	*********	*******	*	****	*******
****	*	*********	*******	*	****	*******
****	*	*********	*******	*	****	*******

끝.