문서번호	목동사업과-3332
결재일자	2020.4.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
★주무관	목동사업과장	체육시설관리사업소장
송점서	이종섭	04/13 김정열
협 조
	운영기획과장		김남대
	주무관		황미령
	주무관		이동열

목동운동장 녹지대 정비공사 추진계획

2020. 4.

서울특별시체육시설관리사업소

(목동사업과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

목동운동장 녹지대 정비공사 추진계획

목동운동장 주경기장뒤 10출입구주변에 대해 녹지대 식재기반 조성, 성토면 고르기 및 마운딩을 조성하고 수목 식재 등을 통하여 쾌적한 경기장 환경을 조성하고자 함

Ⅰ		추 진 근 거

2020년 세출예산서 - 목동운동장·신월야구공원 시설개·보수

Ⅱ		사 업 배 경

현황 및 문제점

목동운동장 주경기장 후면이 녹지조성이 안되어 지반이 노출되고   잡초가 무성하여 미관을 저해하고 있는 반면,

-  주 경기장앞, 화분 36개에 성장된 측백나무가 이식이 필요한 상황

이식할 측백나무와 메타세콰이아 이용, 정원을 새로 만들어 쾌적     한 주변 환경조성이 필요

동문 앞 10번 출입구 녹지대	동문앞 10번출입구 노후 보도블럭 제거지

개선방법

수목 및 잔디 성장을 위하여 50cm 가량 개량토로 교환

넓은 공간에 마운딩 조성후 측백나무 이식 및 에메랄드 그린, 눈향나무,    꽃잔디등을 식재

경계 엣지와 블럭포장 설치로 잔디로 인한 초화류 자생 방지

Ⅲ		사 업 개 요

사 업 명 :  목동운동장 녹지대 정비공사

대 상 지 : 목동주기기장 뒤쪽 10출입구 녹지대

사업기간 : 착공일로부터 50일

규    모 : 964㎡(노후 보도블럭 제거 지역)

사업내용

식재공사

- 에메랄드그린(H1.5×W0.8): 9주 / 배롱나무(H3.0×R12): 11주

시설물공사 : 마운딩 A(14.24㎥), 마운딩 B (5.29㎥) =19.53㎥               토양개량: 476㎥, 등의자 3개소,

수목제거 및 식재 : 메타세콰이아 2열식재 고사목 6주제거 1주 이식

기    타 : 통행로 블록포장은 기존 남은 물량으로 하고 경계엣지              190m, 잔디설치 665㎡, 경관석 3종 46개, 초화                돌단풍등 5종 50본 식재

사 업 비 : 100,000천원 (도급비 100,000천원)

예산과목 : 시민체육시설 운영 및 관리, 노후 체육시설 개보수사업, 목동운동장·신월야구공원 시설개·보수, 시설비 및 부대비, 시설비

Ⅵ		입찰 방법 및 참가자격

입찰 방법

지역제한(서울특별시 관내), 총액입찰, 전자 공개 입찰

참가 자격

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제13조       (입찰의 참가자격)의 규정에 따른 요건을 갖추고,

건설산업기본법 제8조 및 같은법 시행령 제7조(건설업 업종 및 업무내용)

규정에 의한 조경식재공사업 등록업체로서 입찰공고일 전일기준 법인     등기부상 본점(개인사업자인 경우에는 사업자등록증 또는 관련 법령에 따른     허가‧인가‧면허‧등록‧신고 관련된 서류에 기재된 사업장)이 서울특별시      관내인 업체이어야 하며 입찰일(낙찰자는 계약체결일)까지 당해 자    격이 유지되어야 함.

국가종합전자조달시스템이용자등록을 한 업체이어야 하며, 미   등록업체는 입찰집행일 전일까지  조달청 ☞ (www.g2b.go.kr)

입찰참가자격등록규정에 따라 입찰참가자격 등록을 하여야 함.

Ⅶ		추진실적 및 향후계획

추진실적

2020. 02. 22. : 자체시행 설계도면 작성용역 추진계획 수립

2020. 03. 02. : 자체시행 설계도면 작성용역 발주

2020. 03. 04. ~ 04. 02. : 자체시행 설계도면 작성용역 완수

향후계획

2020. 04. : 공사발주 및 계약, 착공.

2020. 06. : 공사 준공

붙임 : 1. 공사설명서(시방서) 1부.

2. 도면 1부.

3. 설계내역서 1부. 끝.