문서번호	설비부-5470
결재일자	2020.4.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축설비과장	설비부장
전상은		김은덕	04/13 代여인웅
협조

『퇴계로(2단계) 보행친화공간 재편 전기공사』

실정보고(작업시간 조정)에 대한 검토

2020. 4.

도시기반시설본부

( 설 비 부 )

『퇴계로(2단계) 보행친화공간 재편 전기공사』

실정보고(작업시간 조정)에 대한 검토

『퇴계로(2단계) 보행친화공간 재편 전기공사』와 관련하여, 건설사업관리단으로부터 제출된 실정보고(작업시간 조정)에 대한 검토 결과를 아래와 같이 보고 드림.

Ⅰ
		관 련 근 거

□ 건설사업관리단 ㈜이산 퇴계-20-40호(2020. 4.10.)

【공사구간 민원발생에 따른 작업시간 조정 검토 보고】

Ⅱ
		공 사 개 요

□ 공 사 명 : 퇴계로(2단계) 보행친화공간 재편 전기공사

□ 공사위치 : 퇴계로2가 교차로 ~ 광희동 사거리

□ 공사내용

- 가로등 분전반 교체(7면), 가로등(주) 교체(113본)

- 교통신호제어기 교체(6면), 교통신호등 교체(78조)

- 기타 배관(배선) 등

□ 계약금액 : *************원

□ 계약기간 : 2019. 9. 2. ~ 2020. 8.31.

□ 계약업체 : *****************

□ 건설사업관리단 : ***

Ⅲ
		검토 내용

□ 공사구간 민원발생

○ 퇴계로 5가 ~ 4가 구간 시공 중 오토바이 거리 이륜차 연합회로부터 공사 시행 불만(주민공청회 없이 공사 시행) 및 공사로 인한 흙먼지 발생 등으로 공사 중지, 피해보상을 요구

○ 위 민원발생에 따른 민원 최소화로 토목 및 조경공사을 주간 작업에서 야간작업으로 시행 예정

□ 검 토 결 과

○ 토목 및 조경공사 야간작업 시행에 따른 병행공사인 전기공사를 당초 주간작업에서 야간작업으로 변경 시공

○ 야간 작업 주요 내용

- 가로등 철거공사 : 가로등 6본(12m 2등용) 철거

- 가로등 신설공사 : 가로등 6본(9m 2등용), 분전반 1면, 지중배관 209m 설치 등

- 광케이블 지중배관공사 : 지중배관 182m(PE Φ100㎜ 1열), 맨홀 5개소 설치

○ 야간 작업에 따른 도급비 증가액

구 분	금 액(원)			비 고
	당 초(주간)	변 경(야간)	증 ‧ 감액
도 급 비	32,461,000	55,869,000	증 23,408,000

□ 건설사업관리단 검토의견

○ 주공종(토목공사) 주간작업에서 야간작업으로 변경 시행으로 병행공종인 해당 공사도 주간작업에서 야간작업으로 변경하는 것이 타당하다 사료됨.

Ⅳ
		보고자 의견

□ 건설사업관리단 실정보고 내용 검토한 결과,

○ 공사 일부 구간(퇴계로 5가 ~ 4가) 민원발생으로 가로등 철거 및 신설, 광케이블 지중배관공사 등을 당초 주간작업에서 야간작업으로 변경 시행 등 건설사업관리단의 실정보고는 적정하여 승인통보하고

○ 변경된 사항에 대하여 추후 설계변경에 반영하고자 함.

붙 임 : 건설사업관리단 검토 보고 1부. 끝.