문서번호	토목부-7541
결재일자	2020.4.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도시고속도로과장	토목부장
김구		장수철	04/14 김용제
협조

금하지하차도 방음터널 충격흡수시설 설치 검토 보고

【강남순환도시고속도로 4공구 건설공사】

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 4.

도시기반시설본부

토 목 부

금하지하차도 방음터널 충격흡수시설 설치 검토 보고

【강남순환도시고속도로 4공구 건설공사】

금하지하차도 U-type 구조물에 설치된 터널형 방음벽 구간의 차량 충돌에 의한 2차 사고발생 방지를 위한 안전시설물 설치를 반영하고자 보고 드림.

1		공사개요

❍ 위    치 : 금천구 독산동~소하JCT

❍ 규    모 : 폭 4~8차로, 연장 2.48km

❍ 도 급 액 : 202,020백만 원

❍ 사업기간 : ’01. 12. 29. ~ ’20. 5. 31.

❍ 시공사/감리단 : 롯데건설(주) / ㈜서영엔지니어링

2		보고내용

❍ 금하지하차도 U-type 구조물(시점부 C-line과 종점부)에 설치된 터널형 방음벽 구간에 차량 충돌에 의한 2차 사고발생 방지를 위하여 충격흡수시설 설치가 필요함.

❍ 위치도

❍ 단면도

❍ 수량 변경 현황

공종	규격	단위	당 초	변 경	증․감	비고
방음벽 충격흡수시설	180×4T×6,330L	m	-	620	620

❍ 공사비 증·감 현황

(단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증․감	비 고
직접공사비	-	200,260	200,260
제경비	-	41,940	41,940
계	-	242,200	242,200

3		조치계획

❍ 금하지하차도 방음터널 구간의 충격흡수시설 설치에 대한 책임건설사업관리기술인의 실정보고 내용은 적정하므로 승인처리하고 설계변경에 정산 반영하고자 함.

❍ 단가적용

- 신규단가에 대해 계약상대자와 성실히 협의를 하였으나 이견이 있어 강제협의율[(낙찰률 69.28%+100%)×1/2] 적용

붙임  건설사업관리기술자 검토의견서 1부.  끝.