실정보고 검토서

공사명

강남순환도시고속도로 4공구 건설공사

공사개요

· 위    치: 금천구 독산동~소하동 JCT

· 규    모: 폭4~8차로, 연장 2.48㎞

· 공사기간: ’01.12.29.~’20.5.31.

· 도 급 비: 202,020백만 원

· 시공사: 롯데건설(주)

· 감리단: ㈜서영엔지니어링

· 설계사: ㈜서영엔지니어링

실정보고 건명

도로표지판 설치 협의 결과 반영

실정보고

사유

금하지하차도 신설에 따른 교통·도로표지판 설치에 대하여 관계기관(교통운영과, 서울지방경찰청) 협의 결과에 따라 반영

건설사업관리단

검토의견

금하지하차도 주변 도로표지판은 유관기관의 협의결과에 따라 변경이 필요한 것으로 사료되며 시공 수량 및 공사비는 적정함.

공기에 미치는 영향

(  -  )  개월

변경(안)

구분	당초	변경	비고(증감)
교통표지	부착식 17개소 부착식 14개소 내민식 6개소	부착식 67개소 부착식 49개소 내민식 6개소	증) 50개소 증) 35개소 -
도로표지	부착식 1개소 단주식 1개소 - 내민식 46개소 문형식 6개소 - -	부착식 1개소 단주식 1개소 복주식 1개소 내민식 48개소 문형식 6개소 표지판 교체 4개소 표지판 이설 1개소	- - 증) 1개소 증) 2개소 - 증) 4개소 증) 1개소
금액	731,300,000	776,500,000	증) 45,200,000

예산조치 계획

당초 도급비 범위내 시행가능 (    )

당초 사업비 범위내 시행가능 ( ○ )

별도(추가) 예산 확보 필요   (    )

추가 행정절차 이행 필요여부

- “해당 없음”

발주처

검토의견

금하지하차도 신설에 따른 교통·도로표지판 설치에 대하여 관계기관 협의 결과에 따라 반영함이 적정함.

비 고

붙임: 교통운영과 관련공문 1부.

결재

담당

김구

과장

장수철

부장

04/14

김용제