실정보고 검토서

공사명

강남순환도시고속도로 4공구 건설공사

공사개요

· 위    치: 금천구 독산동~소하동 JCT

· 규    모: 폭4~8차로, 연장 2.48㎞

· 공사기간: ’01.12.29.~’20.5.31.

· 도 급 비: 202,020백만 원

· 시공사: 롯데건설(주)

· 감리단: ㈜서영엔지니어링

· 설계사: ㈜서영엔지니어링

실정보고 건명

진성연립 부지(박미사랑공원) 옹벽보수 및 펜스 설치

실정보고

사유

박미지하차도 사유지(진성연립, 금천구 시흥동 963-1) 구간에 보상 완료되어 조성된 박미사랑공원의 옹벽 및 펜스 설치비 반영

건설사업관리단

검토의견

서울시 도로시설과에서 요구한 “박미사랑공원” 조성을 위한 진성연립 옹벽보수 및 펜스 설치에 대한 수량 및 공사금액은 적정함

공기에 미치는 영향

(  -  )  개월

변경(안)

구분	당초	변경	비고(증감)
규모	- - -	열화방지 표면처리 314m2 면처리 314m2 옹벽상단 메시펜스 30경간	증) 314m2 증) 314m2 증) 30경간
금액	-	36,400,000	증) 36,400,000

예산조치 계획

당초 도급비 범위내 시행가능 (    )

당초 사업비 범위내 시행가능 ( ○ )

별도(추가) 예산 확보 필요   (    )

추가 행정절차 이행 필요여부

“해당 없음”

발주처

검토의견

박미지하차도 보상된 사유지(진성연립, 금천구 시흥동 963-1) 구간에 조성된 박미사랑공원의 옹벽 및 펜스 설치비 반영은 적정함.

비 고

결재

담당

김구

과장

장수철

부장

04/14

김용제