문서번호	도시철도토목부-4186
결재일자	2020.4.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		토목3과장	도시철도토목부장
정병구		임병길	04/14 정대현
협 조
	주무관			엄태용

『진접선(4호선 연장) 차량기지 1공구(인입선) 건설공사』

현장 발생암 매각대금 처리방안 실정보고

2020. 4.

서울특별시 도시기반시설본부

(도시철도토목부)

『진접선(4호선 연장) 차량기지 1공구(인입선) 건설공사』

현장 발생암 매각대금 처리방안 실정보고

『진접선(4호선 연장) 차량기지 1공구(인입선) 건설공사』 발생암(발파암 441,499㎥)에 대한 매각대금 정산방법 실정보고에 대하여 검토하고 결과를 보고 드림

※ 관련문서 : 동명감 진접1 제2020-104호(2020.4.13.) “발생암 매각 계약체결 및 매각대금 처리 실정보고”

1		공 사 개 요

❍ 공 사 명 : 진접선(4호선 연장) 차량기지 1공구(인입선) 건설공사

❍ 규    모 : 총연장 5,669m(입출고선 5,556m, 차량기지 113m)

- 단선(상,하행) 1,459m, 복선 4,097m, 환기구 2개소

❍ 계약기간 : 2018.12.31. ~ 2024.10.29

❍ 총사업비 : 90,948백만원 (1차공사 4,000백만원)

❍ 시공사/감리사 : ㈜KCC건설/ ㈜동명기술공단외 4개소

2		추 진 경 위

❍ ‘20. 2.20 : 현장 발생암 매각방안 검토 및 승인(본부)

❍ ‘20. 2.26 : 토석정보공유시스템 “토석매각 입찰공고”

❍ ‘20. 3. 2 : 토석매각 현장설명회 개최(현장사무실)

❍ ‘20. 3. 6 : 토석매각 입찰(****************************)

❍ ‘20. 3.18 : 현장 발생암 매각 입찰결과 승인(본부)

❍ ‘20. 3.25 : 발생암 매각계약 체결(****************)

3		보 고 내 용

❍ 발생암 매각계약 체결완료 (‘20.4.7 착수)

*****	**** *****	**** ***	******* ***	***
*****	*****	*******	************	*******
*****	*****	*******	************
*		********	**************

❍ 발생암 매각대금 처리계획

- 발생암 처리물량(설계상 예상수량)

(단위:㎥)

발생암 반출위치	암 종 별 물 량
	합계	연 암	보통암	경 암
환기구#1 (작업구1)	100,777	52,371	24,789	23,617
환기구#2 (작업구2)	216,260	39,464	43,977	132,819
작업구3 (종점갱부구)	124,462	18,001	24,223	82,238
계	441,499	109,836	92,989	238,674

- *************

****************************************************

******************************************

*************************************

4		건설사업관리단 검토의견

❍ ***************************************************************************

- ************************************************,

❍ 추후 변경수량에 대하여 발주처 설계변경 자문회의를 거쳐 설계변경에 반영하는 것이 행정절차 및 공사관리 측면에서 적정한 것으로 판단됨.

5		보고자 의견

❍ 진접선(4호선연장)차량기지 1공구 현장 발생암 매각대금 처리방안 실정보고 건은 건설사업관리단 검토의견이 행정절차 및 관리측면에 적정하다고 판단되므로 원안대로 승인 조치하고 추후 설계 변경시 정산 반영코자 함.

붙임 : 1) 건설사업관리단 실정보고 1부.

2) 관련 서류 각 1부.  끝.