문서번호	운영과-2188
결재일자	2020.4.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		운영과장	중랑물재생센터소장
도형철		최영효	04/10 정훈모
협조
	주무관		안종필

하수 및 분뇨처리장 악취기술진단 용역계획 보고

2020. 4.

중랑물재생센터

(운영과)

하수 및 분뇨처리시설 악취기술진단 용역계획 보고

우리센터의 하수 및 분뇨‧정화조 시(공공환경시설)에서 발생되는 악취로 인한 주민의 건강상 위해를 예방하고, 생활환경을 보전하기 위한 악취기술진단 용역을 다음과 같이 시행하고자 보고 드립니다.

1		추진목적

‘2020년 악취기술진단(5년 주기)을 시행하여 물재생센터에서 발생되는            악취로 인한 주민의 건강상 위해 예방 및 생활환경을 보전하기 위함.

2		시행근거

악취방지법 제16조의2, 같은 법 시행규칙 제13조의2(2014.09.25.시행)

공공환경시설의 기술진단비용(환경부 고시 제2013-143호, 2013.11.18.)        공공환경시설 기술진단 업무처리규정(환경부훈령 제1039호,2013.05.02.)

3		악취기술진단 실기기관

악취방지법 제16조의 2: 한국환경공단 및 기술진단전문기관

환기법 제31조 및 같은법 시행령 제33조: 한국환경공단

4		진단비용

근거: 공공환경시설의 기술진단비용(환경부고시 제2016-21호, 2016.11.25.)

악취 기술진단 업무처리절차

5		추진 경과

‘20. 1. 13. : 중랑물재생센터 하수 및 분뇨처리장 악취기술진단 시행보고

‘20. 1. 15. : 계약심사 결과 통보(계약심사과 → 우리센터)

‘20. 1. 16. : 사전규격공개 통보(관리과 → 운영과)

‘20. 1. 17. : 계약 의뢰(우리센터 → 재무과)

- 입찰불가: 『악취방지법』 제16조의3항 규정에 의거 기술진단전문기관 등업업체 1인뿐인 경우

‘20. 1. 28. : 하수 및 분뇨처리시설 악취기술진단 신청(우리센터 → 한국환경공단)

‘20. 3. 23.  : 하수 및 분뇨처리시설 악취기술진단 비용알림(한국환경공단 → 우리센터)

- 『악취방지법』개정(과태료 조항 신설, 2016. 7.28.)인한 지연 발생.

악취기술진단 신청시 접수순에 따라 지연 ‘2023. 이후 기술진단 가능.

6		계약 방법

관련근거: 지방계약법 시행령 25조

- 다른 법률에 따라 『악취방지법』 제16조의3항 규정에 의거 기술진단전문기관              등록된 업체 등 환경부 전문기관 등록현황 1인뿐인 경우.

수의계약 사유: 악취방지법 개정(과태료 조항 신설, 2016.7.28.)이후

- 악취기술진단 신청물량이 급증으로 한국환경공단 기술진단 업무수행이 지연,               2023년도 이후 실시 가능[한국환경공단, 악취진단1부-634호(2020.3.23.)

업체현황

- 상    호: ㈜대양환경기술

- 주    소: 강원도 강릉시 주문진읍 농공단지 길 28-21

- 등록번호: 원주지방환경청 제1호

- 대  표  자: 주식회사 김재규, 김영규

- 전화번호: □ 033-662-1738

※ 『악취방지법』 제16조의3항에 의거 기술진단전문기관으로 등록한 업체

진단(계약)기간: 착수일로부터 ~ 12. 31. [착수일로부터 7개월(210일)]

소요예산(법정수수료): 208,205천원(부가세포함)

- 처리시설 부지경계선 악취물질 측정․분석에 악취검사기관 검사수수료에 따라 별도 진단비용 산정.

[별표] 악취배출시설 기술진단비용(환경부 고시 제2016-214호) 5항

예산과목: 공통분야 유지보수, 사업비용, 영업비용, 처리장비, 수선유지교체비(수선유지비)

※ 1처리장 완공(하수도과학관 지하)으로 공법추가 수수료증가분 과목 잔금 정산.

7		추진 대상

시 설 명: 서울특별시 중랑물재생센터

소 재 지: 서울특별시 성동구 자동차시장 3길 64(용답동)

시설용량: 하수 – 159만㎥/일, 분뇨‧정화조 – 4000kl/일

대상시설

▶ 중랑공공하수처리시설 : 1,590,000톤/일

-1단계:  100,000톤/일, 표준활성슬러지법

-2단계:  780,000톤/일, MLE공법

-3단계:  710,000톤/일, SBAF공법

▶ 중랑공공분뇨처리시설 : 4,000톤/일, 전처리공정 후 공공하수처리시설로 연계

8		추진 일정

하수 및 분뇨처리시설 악취기술진단 보고 : ‘2020. 4.13.

악취기술진단 신청서 발송(대양환경기술) : ‘2020. 4.13.

기술용역타당성 심사(기술심사담당관)    : ‘2020. 4. 17.

일상감사 의뢰                          : ‘2020. 4. 29.

계약 체결(센터 관리과)                 : ‘2020. 5. 4.

착수 및 진단완료                       : ‘2020. 5. ~ 12. 31.

9		행정 사항

악취기술진단 시행으로 시설별 미비사항 및 개선대책 강구

악취기술진단과 연계하여 연차별 악취저감 예산수립 계획 시행

- 악취기술진단 시행 후 시설 보수‧보강 추진.

붙임: 1. 공공환경기술 진단비용(환경부고시 제2016-21호).

2. 환경부 고시(기술진단 등록현황) 1부..

3. 견적서(대양환경기술) 및 수의계약 사유서 각 1부.

4. 과업지시시 및 설계내역서 각 1부.

5. 악취기술진단 비용알림 등 연장관련 공문(한국환경공단). 3부.  끝.