투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	총무과장
(경유)
제목	설계변경 시행 및 계약의뢰-한강공원 나들목 체계개선 종합정비 용역

『한강공원 나들목 체계개선 종합정비 용역』에 대하여 아래와 같이 설계변경을 시행하고 계약의뢰 하고자 합니다.

가. 용 역 명 : 한강공원 나들목 체계개선 종합정비 용역

나. 용역기간 : 2019.09.06. ∼ 2020.09.04.

다. 계약금액 : 400,000,000원

라. 계 약 자 : 주식회사 제일엔지니어링종합건축사무소   대표 임종선

마. 설계변경 사유서 : 나들목 개선 실시설계 추가과업 시행

구 분	정 산			비 고
	당 초	변 경	증·감
용 역 비	400,000,000	700,000,000	증 300,000,000

사. 예산과목

- 한강공원 관리 및 운영, 한강접근체계개선, 한강공원 나들목 증설 및 개선, 시설비(증 300,000,000)

아. 준공기한연기

- 사유 : 추가과업(나들목 개선 실시설계 등) 수행에 따른 절대공기 부족

- 당초 : 2020. 9. 4.

변경 : 2020.12.31.

- 지체상금부과 : 미부과

첨부 :  1. 설계변경 내역서 1부.

2. 현안사항 보고서 1부.

3. 준공기안 연기의뢰서 1부. 끝.

	시설부장
주무관	김동식		치수과장	손창열		시설부장	04/13 전영주
협조자	주무관	김경화		기획예산과장	문영일		총무과장	이상이
시행	치수과-1559	(		)	접수		(		)
우	04770	서울시 성동구 강변북로 257(성수동1가 642-25)	/
전화	02-3780-0687	/전송	02-3780-0744	/		/	부분공개(5)