“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	서부수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	설계변경(3회) 계약의뢰 (2019년 서강동외 7개동 상수도공사)

우리과에서 시행중인 『2019년 서강동외 7개동 상수도공사(장기계속단가계약)』에 대하여        아래와 같이 설계변경(3회) 계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공  사  명 : 2019년 서강동외 7개동 상수도공사(장기계속단가계약)

나. 계약대상자 : ************

다. 공사  기간 : 2019. 06. 10. ~ 2020. 6. 30.

라. 설계변경 금액내역                                             (단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증․감	비 고
총 공사비		655,976,530	655,976,530	변동없음
도급비	1차수(2019년)	354,876,500	354,876,500	-
	2차수(2020년)	301,100,030	301,100,030	-

마. 설계변경 사유 : 신규공종 발생 및 계약물량 증 ․ 감                       (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증․감	주요공종
합 계	655,976,530	655,976,530	변동없음
1.토 공	118,353,405	164,100,634	45,747,229	아스팔트포장절단 등
2.부설공	119,880,764	95,001,633	-24,879,131	스테인레스관 부설공 등
3.구조물공	19,041,560	20,753,582	1,712,022	월형밸브실 설치공 등
4.부대공	47,721,019	45,881,721	-1,839,298	하수도 복구공 등
5.사급자재비	80,304,040	67,904,867	-12,399,173	주름마디 스테인레스강관 등
6.포장공	10,507,905	12,159,179	1,651,274	보조기층공 등
7.제경비	260,167,837	250,174,914	-9,992,923

바. 최대정산 이행금액(1회 최대 정산금액) : 금300,000,000원

사. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 급․배수공사비, 신설공사비

상수도사업비용, 영업비용, 급배수비, 수선유지교체비

상수도사업비용, 영업비용, 급배수비, 지원사업성시설비

자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비

소방용수시설설치개소수, 소방용수시설등의설치및관리, 소방용수시설설치,

시설비

소방용수시설설치개소수, 소방용수시설등의설치및관리, 소방용수시설보수,

시설비

붙임 : 1. 설계변경내역서 1부.

2. 사전심의 의결서 1부.

3. 사전심의회 개최 결과 1부.

4. 합의서 1부.

5. 설계변경(3회) 방침서 1부.  끝.

	급수운영과장
★주무관	김승진		급수관리팀장	김승완		급수운영과장	04/14 이병운
협조자
시행	급수운영과-6266	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41 홍제동 38-69	/
전화	02-3146-3646	/전송	02-3146-3689	/	ktmksj@seoul.go.kr	/	부분공개(5)