코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	용역 계약내용 변경요청(하천관리 모니터링 용역)

1. 하천관리과-5863(2020.4.14.)호와 관련입니다.

2. 우리 부서에서 추진 중인 ‘하천관리 모니터링’ 용역과 관련하여 준공기한 연기에 따른 용역계약 변경을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용역개요

○ 계약건명 : 하천관리 모니터링

○ 계약업체 : 서울하천네트워크

나. 변경내용

○ 계약기간 : (변경전) ‘19. 5. 23. ~ ‘20. 4. 20.

(변경후) ‘19. 5. 23. ~ ‘20. 5. 29.

○ 변경사유 : 코로나19 발생으로 인한 과업 기간 부족으로 준공기한 연기

붙임 : 1. 준공기한 연기의뢰서 1부.

2. 방침서 및 붙임 문서(합의각서) 각 1부.  끝.

	하천관리과장
실무사무관	김영희		하천계획팀장	이승우		하천관리과장	04/14 한유석
협조자
시행	하천관리과-5924	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 서소문별관8층(하천관리과)	/	http://www.seoul.go.kr
전화		/전송		/		/	대시민공개