투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	남부도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	대방지하차도 조명개선공사 설계변경 계약의뢰

1. 기전과-2108(2020. 4.13.)호와 관련입니다.

2. 대방지하차도 조명개선공사 관련하여 공사완료에 따른 설계변경을 아래와 같이 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 대방지하차도 조명개선공사

나. 공사기간 : 2020. 3.12. ~ 2020. 5.10.

다. 계 약 자 : ***************

라. 설계변경사유 : 공사완료에 따른 제경비 실 정산내역 반영

마. 계약금액                                                  (단위 : 원)

구분	당초	변경	증감
도급비	***********	**********	**********

바. 예산과목 : 도로시설관리, 기전시설물관리, 도로시설물 노후조명시설개선, 시설비및부대비, 시설비

붙임 : 1. 설계변경 검토보고서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

	서울특별시 남부도로사업소장
주무관	김해중		기전과장	代김해중		남부도로사업소장	04/14 변봉섭
협조자	주무관	조소현		관리단속과장	이원철
시행	기전과-2121	(		)	접수		(		)
우	07415	서울특별시 영등포구 도림로 145	/
전화	3284-5432	/전송	832-5470	/	win686@seoul.go.kr	/	부분공개(6)