문서번호	하천관리과-5863
결재일자	2020.4.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
실무사무관	하천계획팀장	하천관리과장
김영희	이승우	04/14 한유석

하천관리 모니터링 용역 준공기한 연기 검토보고

하천관리과

(하천계획팀)

하천관리 모니터링 용역 준공기한 연기 검토보고

시민참여 예산으로 추진 중인 하천관리 모니터링 용역의 완성도 향상을 위하여 준공기한을 연기하고자 보고 드림

□ 용역 개요

❍ 용 역 명 : 하천관리 모니터링

❍ 계약금액 : 877,115천원(기성:60,980,500/잔금:26,134,500)

❍ 계약기간 : ‘19. 5. 23. ~ ‘20. 4. 20.

❍ 계 약 자 : 서울하천네트워크

❍ 과업 주요내용

- 주요 4개 하천(중랑천, 도림천, 양재천, 홍제천)의 생태환경 조사

- 하천별 관리전략 보완방안 마련

- 생태보존을 위한 사업방안 등 제시

- 하천 생태환경 유지·관리를 위한 네트워크 구축, 운영 등

□ 과업 추진경위

❍ ‘19. 5. 23. : 용역 계약

❍ ‘19. 6. 10. : 착수 보고

❍ ‘19. 6.~11. : 전문가 자문, 세미나 등 과업 수행

❍ ‘19. 12. 6. : 중간 보고

❍ ‘19. 12. 17. : 용역 변경 계약

- 과업내용 변경, 계약기간 변경(‘19. 12. 20. → ‘20. 4. 20.)

❍ ‘19. 12. 17. : 기성 부분 준공

- 준공금액: 60,980,500원(잔금:26,134,500)

❍ ‘20. 12.~3. : 세미나 등 과업 수행

❍ ‘20. 3. 24. : 중간 보고

□ 주요변경 내용

❍ 계약기간 변경

- (변경전) ‘19. 5. 23. ~ ‘20. 4. 20.

- (변경후) ‘19. 5. 23. ~ ‘20. 5. 29.

❍ 변경사유

- 봄철 생태현황조사, 전문가 자문 시행 등을 과업 내용에 포함하였으나 코로나19 발생으로 인한 현장조사 및 보고회(최종자문보고) 기간 부족으로 준공기한 연기 필요

- 귀책사유: 서울특별시

- 지체상금: 미부과

□ 향후계획

❍ ‘20. 4.       : 용역변경 계략의뢰(재무과)

❍ ‘20. 4. ~ 5. : 최종(자문) 보고

❍ ‘20. 5.       : 용역 준공

붙임 : 1. 준공기한 연기의뢰서 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.