문서번호	시설과-641
결재일자	2020.4.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
시설팀장		시설과장	시설관리부장
최이영		송병욱	04/16 신용철
협조

「암사 배출수시설 개량 및 증설공사」

구조물공 철근 가공·조립 수량 정산 실정보고

2020. 4.

시설관리부

(시 설 과)

「암사 배출수시설 개량 및 증설 공사」

구조물 철근 가공·조립 수량 정산 실정보고

배출수지 구조물 철근 자재에 대한 ‘현장 가공 및 조립‘ 품의 수량 증,감사항에 대한 정산 실정보고임.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 암사정수센터 배출수처리시설 증설 및 개량공사

○ 공사개요 :

- 1정수장 배출수지 증설   : B7.75 × L32.4 × H4.0 × 1지(증 1,004㎥)

- 1정수장 배슬러지지 증설 : B7.8  × L24.0  ×H4.0 × 1지(증 748㎥)

- 2정수장 배슬러지지 증설 : B5.0  × L16.5  ×H3.5 × 2지(증 578㎥)

○ 공사기간 : 2018. 07. 25. ~ 2020. 04. 20.

○ 도 급 비 : 3,117 백만원 ( 2차 1,978백만원 )

○ 시 공 사 : ㈜신미화건설 외 1개사

○ 감 리 사 : ㈜화신엔지니어링 외 1개사

□ 보고요지

○ 철근 현장 가공, 조립 수량 적용시 당초 조립 철근량을 가공 철근량으로 분류 적용함으로써 과다 적용된 가공 철근량 공제

- 철근 가공수량은 과다 적용, 철근 조립수량은 과소적용 산출수량의 변경 사항

○ 공사비 증,감 : 감)5,164천원

- 철근 가공, 조립 변경 현황

▸ 철근 가공 : (당초) 262.38ton  → (변경)222.78ton(- 39.60ton)

▸ 철근 조립 : (당초) 262.38ton  → (변경)281.90ton(+19.52ton)

공 종	규 격	단위	당초		변경		증ㆍ감
			수량	금액	수량	금액	수량	금액
철근가공		ton	262.385	67,257,930	222.780	57,105,861	-39.605	-10,152,069
철근조립		ton	262.385	96,942,859	281.905	104,154,875	19.52	7,212,016
직접공사비				164,200,789		161,746,232		-2,940,053
제경비				136,929,211		135,103,768		-2,934,889
도급공사비				301,130,000		296,850,000		-5,164,000

□ 실정보고 검토 내용

1) 설계 현황

○ 구조물공사 중 철근 가공‧조립 수량 중 관급자재 반입규격(8m)에 따른 현장가공 및 조립수량 산출 정산결과 철근가공 수량은 과다, 철근조립 수량은 과소하게 반영되어 있어 수량 정산 필요한 사항

2) 검토내용

○ 철근가공(현장가공)

- 철근가공 수량은 철근 281.90톤에서 반입된 관급자재 길이(8m) 이상의 가공품이 필요 없는 미가공 철근은 가공 철근에서 제외하여 재 산출

- 구조물 철근량 281.90톤중 가공철근 산출결과 당초262.38톤에서 222.78톤으로 수량 39.60톤에 대하여 감액조치

구분	철근량	가공수량		미가공수량		증‧감
		당초	변경	당초	변경
철근가공(톤)	281.90	262.38	222.78	19.52	59.12	감) 39.60

○ 철근조립

- 철근조립 수량은 산출 철근량 281.9톤이 적용되어야 하나 당초 설계내역서는 조립수량을 가공수량(262.38톤)으로 잘못 적용함으로 19.52톤이 과소 적용되어 변경 필요한 사항.

구분	철근량	변경수량		증‧감
		당초	변경
철근조립(톤)	281.90	262.38	281.90	증) 19.52

	<2020년 건설표준품셈 - 한국기술연구원 >

○ 구조물별 철근현황

구분	설 계 량		비고
	총중량(톤)	할증량(톤)
#1배슬러지지	123.402	129.867
#2배슬러지지	67.034	70.167
#1배출수지	91.469	95.901
소 계	281.905	296.006
배출수지 PIT	13.926	14.682
유량계‧분배밸브실	2.132	2.195
맨홀,흄관	9.125	9.370
지브,암롤박스	1.834	1.890
소 계	27.017	28.137
합 계	308.922	324.143	구매수량 : 325톤

□ 공사비 증,감 현황

○ 철근 가공, 조립( 계약단가 적용)

공 종	규 격	단위	당초		변경		증ㆍ감
			수량	금액	수량	금액	수량	금액
#1 배슬러지지
철근가공		ton	110.961	28,442,964	103.542	26,541,230	-7.419	-1,901,734
철근조립		ton	110.961	40,996,538	123.402	45,593,090	12.441	4,596,552
#1배출수지
철근가공		ton	91.469	23,446,522	64.379	16,502,460	27.090	-6,944,062
철근조립		ton	91.469	33,794,868	91.469	33,794,868	-	-
#2 배슬러지지
철근가공		ton	59.955	15,368,444	54.859	14,062,171	-5.096	-1,306,273
철근조립		ton	59.955	22,151,453	67.034	24,766,917	7.079	2,615,464
계
철근가공		ton	262.385	67,257,930	222.780	57,105,861	-39.605	-10,152,069
철근조립		ton	262.385	96,942,859	281.905	104,154,875	19.52	7,212,016
직접공사비				164,200,789		161,746,232		-2,940,053
제경비				136,929,211		135,103,768		-2,934,889
도급공사비				301,130,000		296,850,000		-5,164,000

□ 건설사업관리 기술자 검토내용

○ 상기 검토내용과 같이 설계 내역서의 배출수지 구조물 철근 가공 가공,조립 적용수량에 오류가 있었으며, 철근가공 수량은 과다 적용되었고 철근조립 수량은 과소적용된 것이 확인됨으로 산출된 수량에 따라 설계서 수량 변경에 대해 검토한 결과 적정한 것으로 판단됨.

□ 관련법령 근거

○ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제13장 공사계약 일반조건 제6절 공사 설계의 변경 1항. 설계변경 가. 설계변경은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한다.

1) 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우

□ 조치의견

○ 상기와 같이 배출수지 구조물 공사중 철근 자재에 대한 ‘현장 가공 및 조립‘품의 수량 증,감 정산 실정보고건은 건설사업관리기술자의 검토가 타당하고 공사계약일반조건에 적정하므로 실정보고 사항을 승인코자 하며, 공종별 건당 3천만원 이하로 계약금액조정 심의 소위원회 검토결과에 따라 설계변경에 반영코자 합니다.

붙임 : 현장실정보고(건설사업관리 암사정수-CM-20-030, 2020. 4. 10.) 1부. 끝.