문서번호	시설개선과-3335
결재일자	2020.4.16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설개선과장
박희영		代안봉환	04/16 윤정한
협 조

「잠실야구장 휴게공간 정비공사」

설계변경 검토보고

2020.  4.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

「잠실야구장 휴게공간 정비공사」

설계변경 검토보고

「잠실야구장 휴게공간 정비공사」와 관련하여 현장여건에 따른 물량변경사항에 대해 다음과 같이 설계변경 시행코자 함.

Ⅰ		공사개요

○ 공 사 명 : 잠실야구장 휴게공간 정비공사

***********************

○ 공사기간 : 2020. 3. 9. ~ 2020. 4. 17.

○ 공사내용 : 연식의자설치 55.7m, 파고라 정비 1개소

어린이캐치볼장 조성, 안내판 설치 등

**********************

○ 예산과목 : 시민체육 및 국제스포츠 진흥발전, 시민체육공간 확충, 야구장 시설개보수, 시설비및부대비,시설비

Ⅱ		변경내용

○ 공종별 변경내용

구 분	변경사항	변경사유
철거공	∘폐기물 물량변경 - 벌근제거 : 1주 ⇒ 2주 ∘폐기물 성상변경 - 폐목재 ⇒ 혼합폐기물 ∘폐기물 운반,집적,상차물량 변경 - 1.2㎥ ⇒ 5.8㎥	∘캐치볼장 터파기 작업중 수목뿌리 추가분 발생 ∘오일스테인처리가 되어있어 폐목재로 폐기물처리 불가 ∘임목폐기물 물량 미반영분 반영

○ 제경비 정산

- 산업안전관리비, 건강보험료, 노인장기요양보험료, 연금보험료 정산(감575,647원)

○ 도급비 변경내역

구 분	당초	변경	증.감액
도급비	24,195,970원	23,652,970원	감)543,000원

○ 공사기간 : 변경없음

Ⅲ		검토의견

○ 공사물량, 제경비정산 등의 각종 변경사항에 대하여 설계변경(정산)하고자 함

붙  임  1. 설계변경정산내역서 1부.

2. 검증확인서 1부.  끝.