문서번호	조경과-5672
결재일자	2020.4.16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		조경관리팀장	조경과장
조영곤		김병완	04/16 문길동
협조

2020년 가로정원 조성사업

예산 재배정 검토보고(영등포구_2차)

2020. 4.

푸른도시국

(조 경 과)

2020년 가로정원 조성사업

예산 재배정 검토보고(영등포구_2차)

2020년 가로수 생육환경 및 가로변 녹지량 확충사업 관련 가로정원 조성에 대한자치구의 예산(공사비) 재배정 요청이 있어 검토보고 후 조치하고자 함.

□ 관련근거
❍ 2020년 가로정원 조성사업 공사비 재배청 요청「 영등포구 푸른도시과-6817호('20.4.9.)」

□ 사업개요

❍ 사 업 명 : 2020년 가로정원 조성사업

- 예산사업명 : 가로수 생육환경 및 가로변 녹지량 확충사업(지역건의)

❍ 위    치 : 영등포구 신길동 41-49번지 외 2개소

(신길역 1,5호선 광장, 의사당대로)

❍ 사업기간 : 2020. 1. ~ 5.

❍ 사업내용 : 가로정원 신규조성, 이동형 수목플랜터 설치 등

❍ 사 업 비 : 250백만원(시설비)

□ 심의결과 : 조건부 가결

❍ 통보일시 : 2020. 3. 24.

❍ 설계심의 조치 결과 : 반영

□ 총사업비 재배정 현황

(단위 : 천원)

사업명 / 통계목	총사업비	재배정액	재배정 잔액	비 고
가로변 녹지량 확충사업 시설비	5,945,000	865,231	5,079,769

□ 재배정 검토내용

❍ 재배정기관 : 영등포구(푸른도시과)

❍ 재배정 요청액 : 232,472천원(시설비)

❍ 재배정내역

(단위 : 천원)

기 관	예산현액	기 재배정액	금회 재배정액	재배정잔액	사 유
영등포구	250,000	13,440	232,470	4,090	공사비(2차)

□ 검토결과

❍ 해당 지역건의사업에 대한 공사비를 요청한 사항으로 예산을 재배정하여 적기에 사업을 추진토록 하고자 함.

□ 향후계획

❍ 공사시행 : 2020. 4. ~ 6.

❍ 준공 및 완료보고 : 사업완료 2개월 이내(자치구 → 시주관부서)

붙임 1) 관련공문 1부.

2) 설계심의 의견사항 조치결과 1부.

3) 일상감사 및 원가심사 결과 각 1부.  끝.