코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	『소구역 하수관로 시범정비사업 기술용역』 실정보고 검토결과 알림

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 시와 계약 체결하여 시행중인『소구역 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계용역(장위-4, 면목3-5, 중곡-1)』과 관련 3개 소구역 공통 실정보고사항에 대하여 검토 결과를 아래와 같이 알려드리오니 조정 승인 된 내용을 반영하여 과업 수행에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 검토결과

구 분		보고 수량	검토(조정) 의견	반영 수량	비 고
관로(맨홀) 조사	장위-4	증17.3㎞	재개발 예정구역을 제외한 전체 하수관로(맨홀) 현황 조사 필요	증17.3㎞	‘승인’
	면목3-5	증17.9㎞		증17.9㎞
	중곡-1	증42.2㎞		증42.2㎞
빗물받이 조사	장위-4	증847개소	재개발 예정구역을 제외한 전체 빗물받이 현황 조사 필요	증847개소	‘승인’
	면목3-5	증4,020개소		증4,020개소
	중곡-1	증4,666개소		증4,666개소
GIS DB 구축	장위-4	증31.8㎞	GIS DB 정확도 개선(성북 20년, 중랑·광진 21년) 예정으로 예산 중복투자 우려	0㎞	‘제외’
	면목3-5	증38.9㎞		0㎞
	중곡-1	증64.5㎞		0㎞
개인배수 설비 조사	장위-4	감300동	법적근거 미비 등으로 정화조 직투입 유보됨에 따라 개인배수설비 조사 불필요	감300동	‘승인’
	면목3-5	감300동		감300동
	중곡-1	감300동		감300동

※ 관로(맨홀) 및 빗물받이 조사 물량은 GIS 자료 기준으로 현장 조사결과에 따라 정산.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	장위-4[(주)케이지엔지니어링종합건축사무소 외 2개사],면목3-5[(주)도화엔지니어링 외 2개사],중곡-1[(주)이산 외 2개사]
★주무관	이성연		하수설계팀장	강철규		물재생계획과장	04/16 이임섭
협조자	주무관	이승주		주무관	김민석
시행	물재생계획과-5974	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 1동 8층 (서소문동)	/
전화	02-2133-3856	/전송	02-2133-1042	/	richyon@seoul.go.kr	/	부분공개(5)