문서번호	시설보수과-1597
결재일자	2020.4.20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
신인철		임준빈	04/20 정훈모
협 조
	전문관			주상일
	주무관			차현홍

제2처리장 송풍기동 수배전반 교체 추진계획

2020. 4.

중랑물재생센터

(시설보수과)

제2처리장 송풍기동 수배전반 교체 추진계획

장기간 사용으로 노후된 수배전반설비를 교체하여 성능향상을 통한 안정적인 전력공급설비 구축과 전기 안전사고 예방으로 중단없는 하수처리공정을 확보코자 함.

1		추진근거

’20년 단위사업 조기집행 추진계획 수립********************

○ 전기분야 : 39건(2020년 단위사업 37건, 2019년 이월사업 2건) 추진

’20년 시설비사업 시행계획 및 조기집행계획 수립***********************

○ 조기집행계획 수립 기준 : ***************************  ***********

2		추진배경

시설현황

○ 전력계통도

	《사업대상》
	******************** -************ -******************** -************ -*************

○ 교체대상(현장사진)

수배전반(고압·저압반)	변압기반	저압 공급장치

전력설비

○ 수전설비 : 3.3㎸/440V 2,500KVA × 2대(상시, 예비 각 1대)

○ 부하설비

***	***	***	***	**********	**********
***	***	*********	*** *************	** *********	**** * ****
	***	*********	*** *************	** *********

필 요 성

○ 안정된 전력공급을 위해 내용연수가 초과된 고·저압 수배전반 성능개선 필요

- 송풍기동 전력효율 저하, 저압설비 과열 및 변압기 심한 소음 발생 등

○ 장기간 사용에 따른 노후화로 전기 안전사고 발생 시 원활한 하수처리공정 차질

○ 전기설비 기기(차단기, 보호계전기 등) 성능저하로 고장발생 상시 상존

※ 내용연수 : 배전반 11년, 배전용변압기 10년(조달청고시 제2018-14호)

3		추진계획

추진방안

○ 부하특성, 증설 등을 고려하여 적정한 변압기 용량 설치로 경제적 운영

- 적정한 변압기 용량 산정 및 병렬운전 시행(부하 분담)

․2,500KVA × 2대(1대 예비) ➠ 2,000KVA × 2대(상시운전)

․변압기 계통별 송풍기 부하 분리 운영 : A계열 1~5호, B계열 6~10호

․변압기 적정 부하 분담, 계통사고 발생 시 전력차단 등 성능개선

- 저소음 고효율 변압기 설치, 적정한 Tap 선정(변압기 전압조정장치)

․송풍기 공급전압 변경(440V ➠ 380V) ⇒ 송풍기 자체 전압 탭(Tap)조정

○ 정류기반 신설로 송풍기동 별도 조작전원을 공급하여 차단기 등 안정적 관리

- 공급방식 : 종합설비동 전기실(기존)  ➠ 송풍기동 전기실(변경)

- 출력용량 : DC 110V 50A(충전장치 : DC 12V 120AH 9cell)

○ 수배전반 전기 안전사고 예방을 위한 기능 개선

- 기기열화에 의한 화재예방 장치로 패널(Panel) 상부에 자동소화기 설치

○ 유지관리자의 편리성 도모를 위해 전력계통을 쉽게 알 수 있도록 설치

- 패널(Panel) 전면부에 전력공급계통 회로도(미믹) 표시

○ 패널 내구성 및 디자인 등을 고려하여 정전 분체 도장(함마톤)으로 개선

사업개요

○ 사업대상 : ***************

○ 사업기간 : 2020. 4. ~ 9.

○ 사업내용 : ************************************

○ 소요예산 : *********

○ 예산과목 : ***************************************

○ 추진방법

- *****************************

※*************

******************************************************************************

- ******************

․********************************

추진일정

○ 2020.  4. : 추진계획 수립

○ 2020.  5. : 물품구매 발주

○ 2020.  9. : 납품완료 및 준공

붙 임 : 설계서, 지침서, 도면 각 1부.  끝