문서번호	시설과-786
결재일자	2020.4.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
시설팀장		시설과장	시설관리부장
최이영		송병욱	04/20 신용철
협조

「암사 배출수시설 개량 및 증설공사」

시설물 접근로 계단(목재데크) 설치 실정보고

2020. 4.

시설관리부

(시 설 과)

「암사 배출수시설 개량 및 증설 공사」

시설물 접근로 계단(목재데크) 설치 실정보고

1, 2정수장 배슬러지 시설물 유지관리를 위한 근무자의 안전한 통행을 확보하기 위해 접근로 계단(목재데크) 설치 실정보고임.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 암사정수센터 배출수처리시설 증설 및 개량공사

○ 공사개요 :

- 1정수장 배출수지 증설   : B7.75 × L32.4 × H4.0 × 1지(증 1,004㎥)

- 1정수장 배슬러지지 증설 : B7.8  × L24.0  ×H4.0 × 1지(증 748㎥)

- 2정수장 배슬러지지 증설 : B5.0  × L16.5  ×H3.5 × 2지(증 578㎥)

○ 공사기간 : 2018. 07. 25. ~ 2020. 04. 20.

○ 도 급 비 : 3,117 백만원 ( 2차 1,978백만원 )

○ 시 공 사 : ㈜신미화건설 외 1개사

○ 감 리 사 : ㈜화신엔지니어링 외 1개사

□ 보고요지

○ 1, 2정수장 배슬러지 유지관리를 위해 작업자가 우천 및 결빙 시 안전한 접근성 확보를 위해 계단(목재데크) 시공이 필요

1정수장 배슬러지는 가까운 접근로가 없고, 2정수장 배슬러지지는 돌계단이 설치되어 있으나 경사가 급하고 별도의 난간이 설치되어 있지 않아 근무자의 안전확보를 위해 정수센터에서 요청한 사항 반영.

○ 공사비 증‧감 : 증)13,550천원

공사개요 : 목재계단[(L=6m, B=1.6m) 및 (L=8m, B=1.6m)] 2개소

	< 현 황 사 진 >
< 1정수장 배슬러지지 >		< 2정수장 배슬러지지 >

□ 실정보고 검토 내용

○ 현황 및 문제점

- 1, 2정수장 배슬러지지 유지관리 근무자가 시설물 점검을 위한 안전한 접근로가 확보되어 있지 않아 우천 및 빙설 시 근무자의 안전사고 위험 상존

○ 검토내용

- 접근성 확보를 위해 목재계단 설치는 암사정수센터에서 요청한 사항으로 작업자의 안전확보를 위하여 설계반영이 필요한 것으로 판단됨

▹ 계단설치 시 계단의 경사도 및 유지관리 담당자들의 안전을 고려하고 암사정수센터에서 요청한 목재계단으로 결정함

	< 현 황 도 >
< 평면도 >		< 단면도 >

□ 공사비 증‧감 현황 : 증)13,550원

공 종	크기	단위	단가	수량		공사비		증ㆍ감
				당초	변경	당초	변경	수량	금액
목재데크틀 설치		㎡			29.3		755,598	29.3	755,598
목재데크 설치		㎡			29.3		1,234,444	29.3	1,234,444
목재데크틀 자재비		㎡			29.3		1,286,006	29.3	1,286,006
목재 데크	25T	㎡			29.3		3,941,615	29.3	3,941,615
목재 난간(기둥)	120×120	m			18.0		668,448	18.0	668,448
목재 난간(사이딩)	40×85	m			56.0		1,065,792	56.0	1,065,792
목재난간 설치		m			28.0		339,192	28.0	339,192
직접공사비							9,291,095		9,291,095
제 경 비							4,258,905		4,258,905
도 급 비							13,550,000		13,550,000

□ 건설사업관리 기술자 검토내용

○ 1, 2정수장 배슬러지지 접근성 확보를 위한 계단(목재데크) 설치는 유지관리자의 안전성 확보를 위하여 적정한 것으로 판단 됨

□ 관련법령 근거

○ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제13장 공사계약 일반조건 제6절 공사 설계의 변경 1항. 설계변경 가. 설계변경은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한다.

1) 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우

4) 그밖에 발주기관이 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등

○ 협의율 적용 관련근거

- 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제7절 계약금액의 조정 나. 발주기관이 설계변경을 요구한 경우(계약상대자의 책임 없는 사유로 인한 경우를 포함한다.  “중략”

계약당사자간에 협의가 이루어지지 아니하는 경우에는 설계변경 당시를 기준으로 하여 산정한 단가와 그 단가에 낙찰률을 곱한 금액을 합한 금액의 100분의 50으로 한다.

□ 조치의견

○ 1, 2정수장 배슬러지 시설물 유지관리를 위한 근무자의 안전한 통행을 확보하기 위해 접근로 계단(목재데크) 설치 실정보고건은 건설사업관리기술자의 검토가 타당하고 공사계약일반조건에 적정하므로 실정보고사항을 승인코자 하며, 공종별 건당 3천만원 이하로 계약금액조정 심의 소위원회 검토결과에 따라 설계변경에 반영코자 합니다.

붙임 : 현장실정보고(건설사업관리 암사정수 CM20-054, 2020. 4. 19). 끝.