문서번호	기전과-2203
결재일자	2020.4.20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	남부도로사업소장
김해중		임태수	04/20 변봉섭
협조
	주무관		박상갑

염곡지하차도 조명개선공사

공사실정 보고 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 4

남부도로사업소

(기  전  과)

염곡지하차도 조명개선공사

공사실정 검토보고

『염곡지하차도 조명개선공사』시행 중 공사업체로부터 철거 된 터널등기구 처리 관련 공사실정 보고가 있어 검토하고 보고드림.

▢ 공사현황

○ 공 사 명 : 염곡지하차도 조명개선공사

○ 공사개요

등기구 철거 : NH 250W×496등

등기구 설치 : LED 100W×72등, LED150W×424등

○ 도 급 액 : ************

○ 공사기간 : 2020. 3.13 〜 2020. 5.21

○ 도 급 자 : *******************

▢ 공사실정 보고내용

○ 공사업체 보고내용 검토

공 종	실정보고 내용	검토결과	소요예산
등기구 처리	등기구 재질이 합성수지로 폐기물로 처리요함 (폐기물처리비 미반영)	등기구 재질이 합성수지제품 으로 폐기물로 처리코자 함	*******

○ 발주부서 작업지시(소화기 표시등 설치) 검토

공 종	보고내용	조치내용	비고
소화기 표시등 설치	지하차도내 소화기 표시등 미 설치	지하차도조명개선공사 업체에 소화기 표시등 설치(4개) 후 낙찰차액 이용 설계변경 반영	*******

○ 공사 실정보고로 인한 부족액 예산 조치 방안 – 낙찰차액 활용

구분	발주금액	낙찰금액	낙찰차액	필요예산
도급비	***********	**********	**********	*********

- 예산과목 : 도로시설관리, 기전시설물관리, 도로시설물 노후 조명시설 개선, 시설비

▢ 향후계획

○ 2020. 4.21.    공사실정 검토내용 통보 및 작업지시

○ 2020. 4.28.    설계변경 계약 변경의뢰(기전과→관리단속과)

○ 2020. 5.13.    공사준공

붙임 : 1. 설계변경 검토내역서 1부.

2. 공사업체 공사실정 보고 공문 1부.

3. 관련사진 1부.  끝.