투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	단야공영(주) 대표 김은숙
(경유)
제목	1차 작업지시 공기연장 승인(2020년 한강공원 진출입시설 유지보수 공사)

1. 귀 사의 무궁한 발전과 건승을 기원합니다.

2. 단야2020–한강사업본부005호(2020.4.20.) 와 관련, 귀 사의 공기연장 요청을 아래와 같이 승인코자 하오니 공사 추진에 만전을 기해주시기 바랍니다.

○ 승인사항

- 건    명 : 작업지시(2020년-제1차) 공기연장

- 연장사유 : 우천(4.17.~4.20.)으로 인한 작업불가

- 완료보고서 제출기일 :‘20.4.20.(월) → ‘20.5.5.(화)

끝.

	서울특별시한강사업본부장
주무관	나병윤		기반시설과장	전결 04/20 라철흠
협조자
시행	기반시설과-1310	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 (성수동1가 642-25)	/
전화		/전송	02-3780-0744	/		/	대시민공개