문서번호	시설과-1344
결재일자	2020.4.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설과장
노해민	조민형	04/20 박종수
협 조

「서울숲 노후보일러 및 냉온수기 교체 공사」

설계변경 검토 보고

2020. 4.

동부공원녹지사업소

(시설과)

「서울숲 노후보일러 및 냉온수기 교체공사」

설계변경 검토 보고

「서울숲 노후보일러 및 냉온수기 교체 공사」관련하여 설계변경 사항이 있어 검토 보고 드림

□ 공사개요

❍ 공 사 명 : 서울숲 노후보일러 및 냉온수기 교체공사

❍ 위    치 : 서울시 성동구 뚝섬로 273(서울숲공원)

❍ 규    모 : 냉온수기·냉각탑 1set, 보일러 5대 교체

******************************

*************************************************

******************************************

□ 설계변경 내용

❍ 관련근거 : 공사감독3처-2475(2020.04.17.)

구 분	설 계 변 경 내 용	비 고
가스배관공사 - 방문자센터	◯ 방문자센터 가스메타기 설치 내역 반영 - 가스메타기 설치 : 0 → 1개소 - 가스공사 기술검토 및 인허가비 추가	내역참조
자동제어 설치공사 - 곤충식물원	◯ 보일러 경보알람장치 설치 내역반영 - 보일러 경보알람장치 설치 : 0 → 1식	내역참조
연도설치 공사 - 방문자센터	◯ 연도 라인변경 내역 반영 - STRAIGHT(250P-977) : 11 → 15EA - ELBOW 45(250P-EL45) : 4 → 8EA 등 기타부속품	내역참조

구 분	설 계 변 경 내 용	비 고
연도설치 공사 - 곤충식물원	◯ 연도 라인변경 내역 반영 - STRAIGHT(300P-977) : 3 → 6EA - STRAIGHT(300P-477) : 2 → 6EA 등 기타부속품 - 기존벽체철거 : 4㎡ → 0 - 기존벽체신설 : 4㎡ → 0 등	내역참조
난방 및 급수급탕배관 - 곤충식물원	◯ 배관 실측물량 내역 반영 - 동관평면배관(D100) : 32 → 36m - 동관용접(D100) : 102 → 110개소 등 기타 부속품	내역참조
폐기물 처리	◯ 폐기물처리 관련 서류 미제출 정산 - 폐기물 처리비 543,114원 → 0원	내역참조
기타	◯ 건강보험료 등 제경비 정산 - 내역 참조	내역참조

□ 예산검토

❍ 공사비 증감

구 분		금 액(원)			비 고
		당 초	변 경	증 감
도급비	공 급 가 액	***********	***********	**********
	부 가 세	**********	**********	********
	계	***********	***********	**********
총 도급비		***********	***********	**********	천단위 절삭

❍ 예산 검토

(단위 : 천원)

**	****** ***	*** ***	*** ***	**** ***	********* ***********
**	*******	********	********	*****	**********

- 예산과목 : 동부공원녹지사업소 시설과, 대기환경 개선, 질소산화물 저감 및 대기오염 감시, 공공건물 노후보일러 교체, 시설비 및 부대비, 시설비(401-01)

□ 검토의견

○ 상기 내용과 같이 설계변경(정산) 시행코자 함

○ 공사비 증액분은 낙찰 및 집행잔액을 활용

○ 계약부서에 설계변경 계약 의뢰(→공원운영과)

붙  임  1. 시설공단 설계변경 요청 공문 및 보고서 각 1부
2. 변경내역서 1부

3. 제비율 검증확인서 1부.  끝.