문서번호	환경수질과-2032
결재일자	2020.4.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	환경수질과장	운영부장
전시은	최동주	04/21 송영민

물고기 인공산란장 변경 설치 보고

2020. 4.

한강사업본부

(환경수질과)

물고기 인공산란장 변경 설치 보고

건강한 한강 수생태계 유지를 위해 인공 수초를 설치하여 물고기 산란장소로 조성하고자 추진하였으나 기상조건 악화로 물고기 인공산란장 설치를 축소·연기하여 설치하고자 함.

Ⅰ	추 진 계 획

□ 2020년 물고기 인공산란장 조성계획[환경수질과-1107(2020.3.10.)]에 의거 시행

□ 설치장소 : 성수대교 하류, 탄천 합류부, 반포천 하류, 염창나들목 앞,

난지야구장 하류, 동작대교 하류, 밤섬 북단 (7개소)

□ 설치규모 : 45m×50m×7개소

Ⅱ	변 경 사 유

□ 일정연기 : 기상조건 악화 [현장 풍속 27m/s (풍속 21m/s이상 태풍경보)]

□ 규모축소 : 설치일정 연기(4월말→5월초)에 따른 산란기간 감소로 빠른 설치 필요

Ⅲ	변 경 내 용

□ 설치일정 : 2020.4.21.~4.23.(3일) → 2020.5.6.~5.7.(2일)

□ 설치규모 : 45m×50m×7개소 → 45m×50m×5개소

□ 설치장소 : 성수대교 하류, 탄천 합류부, 반포천 하류, 동작대교 하류, 밤섬 북단 (5개소)

- 제외대상 : • 난지야구장 하류 : 자연호안으로 자연산란이 가능

• 염창나들목 앞 : 기존 인공산란장과 설치거리 고려

Ⅳ	추 진 일 정

□ 2020. 5. 6 ~ 5. 7 : 틀, 앙카, 수초 등 인공산란장 설치

□ 2020. 5. ~ 6. (산란기간내) : 산란장 운영

□ 2020. 7. : 산란 종료 및 시설물 철거(장마로 인한 홍수 예보시 조기 철거)