문서번호	시설과-714
결재일자	2020.4.17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설과장	시설관리부장
정성오		송병욱	04/17 신용철
협 조
	주무관			최성태
	주무관			임춘길
	주무관			박상권
	주무관			박건수

「암사배출수처리시설 증설 및 개량공사 건설폐기물 처리용역」

계약금액조정 심사 소위원회 개최결과 보고

2020. 4.

상수도사업본부

(시  설  과)

「암사배출수처리시설 증설 및 개량공사 건설폐기물 처리용역」

계약금액조정 심사 소위원회 개최결과 보고

배출수 및 배슬러지지 공사과정에서 발생한 건설폐기물 물량 증·감 반영건에 대한 계약금액조정 심사 소위원회를 개최하고 그 결과를 보고 드림

□ 용역현황

○ 용 역 명 : 암사배출수처리시설 증설 및 개량공사 건설폐기물 처리용역

○ 용역개요

- 건설폐기물 운반 : 폐아스콘 186㎥, 폐콘크리트 428㎥

- 건설폐기물 처리 : 폐아스콘 437ton, 폐콘크리트 984ton

○ 용역기간 : 2018. 09. 21.~2020. 4. 20.(총괄)

2019. 01. 01.~2020. 4. 20.(2차분)

○ 도 급 비 : 39,918,000원 (2차 : 37,495,000원)

○ 용 역 사 : (유)도성개발  대표 윤칠중

□ 소위원회 개최 개요

○ 일   시 : 2020. 4. 17.(금) 13:30

○ 장   소 : 시설관리부 회의실

○ 안   건 : 건설폐기물 수량변경 실정보고

○ 심사위원

- 팀  장 : 시설과장 송병욱

- 팀  원

소 속	직 급	성 명
누수방지과	지방시설주사	최 성 태
시설과(시설관리팀)	지방시설주사	임 춘 길
시설과(시설팀)	지방시설주사	박 상 권
	지방시설주사보	박 건 수

□ 계약금액 조정 심사내용

○ 물량 증·감 현황

종 별	구분	전체			2차			비 고
		당초	변경	증·감	당초	변경	증·감
폐아스콘	㎥	186	123	-63	186	123	-63
	Ton	437	290	-147	437	290	-147
폐콘크리트	㎥	428	455	27	395	422	27
	Ton	984	1,047	63	908	971	63

○ 용역비 증·감 현황 : 감)1,382천원

구 분	당 초	변 경	증·감
전 체	39,918,000	38,536,000	감) 1,382,000
2차분	37,495,000	36,113,000	감) 1,382,000

○ 물량 증·감 사유

- 공사과정에서 추가 발생된 폐콘크리트량과 아스팔트 포장면적 감소에 따른 폐야스콘 물량 증·감 발생

□ 심사결과 : 적정

2020년 4월 17일

위 검토자 : 계약금액조정 심사 소위원회

팀 장 :	시설과장		송 병 욱
팀 원 :	누수방지과	지방시설주사	최 성 태
	시설과(시설관리팀)	지방시설주사	임 춘 길
	시설과(시설팀)	지방시설주사	박 상 권
		지방시설주사보	박 건 수

붙 임 : 계약금액조정 심사 관련 서류 1부.  끝.