투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	총무과장
(경유)
제목	정산 설계변경에 따른 변경계약 의뢰 [한강공원 나들목 증설공사(망원) 총차4회, 3차1회]

우리 본부에서 추진중인 『한강공원 나들목 증설공사(망원)』에 대하여 정산 설계변경(총차 4회, 3차 1회)에 따른 변경 계약을 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 한강공원 나들목 증설공사(망원)

나. 공사기간 : (총차) 2017.11.22. ~ 2020. 5. 9.

(3차) 2020. 1. 1. ~ 2020. 5. 9.

다. 계약금액 : (총차) 7,045,600,000원

(3차)   800,700,000원

라. 계 약 자 : 홍용종합건설(주) 대표자 : 정영승

마. 설계변경 사유

○ 공사 준공에 따른 정산 설계변경(총차 4회, 3차 1회) [치수과-1601(2020.4.16.)호]

바. 변경사항

(단위: 원)

구 분		당 초	변 경	증·감	비고
도급비	총차	7,045,600,000	7,531,700,000	증)486,100,000	4회(정산)
	3차	800,700,000	1,286,800,000	증)486,100,000	1회(정산)

바. 예산과목 : 한강공원 이용 및 생태환경 개선, 한강 접근체계 개선, 한강공원 나들목 증설 및 개선, 시설비(401-01)

붙임  1. 설계변경 보고서 및 시행문 각 1부.

2. 총차 4회, 3차 1회 정산 설계변경 내역서 각 1부.  끝.

	치수과장
주무관	김태규		치수과장	04/17 代방대환
협조자
시행	치수과-1623	(		)	접수		(		)
우	04770	서울시 성동구 강변북로 257(성수동1가 642-25)	/
전화		/전송		/		/	부분공개(5)