문서번호	시설과-691
결재일자	2020.4.17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관		시설과장
정성오		04/17 송병욱
협 조
	주무관		최성태
	주무관		임춘길
	주무관		박상권
	주무관		박건수

「암사배출수처리시설 증설 및 개량공사 건설폐기물 처리용역」

계약금액조정 심사 소위원회 개최

2020. 4.

상수도사업본부

(시  설  과)

「암사배출수처리시설 증설 및 개량공사 건설폐기물 처리용역」

계약금액조정 심사 소위원회 개최

□ 용역현황

○ 용 역 명 : 암사배출수처리시설 증설 및 개량공사 건설폐기물 처리용역

○ 용역개요

- 건설폐기물 운반 : 폐아스콘 186㎥, 폐콘크리트 428㎥

- 건설폐기물 처리 : 폐아스콘 437ton, 폐콘크리트 984ton

○ 용역기간 : 2018. 09. 21.~2020. 4. 20.(총괄)

2019. 01. 01.~2019. 4. 20.(2차분)

○ 도 급 비 : 39,918,000원 (2차 : 37,495,000원)

○ 용 역 사 : (유)도성개발  대표 윤칠중

□ 계약금액 조정 내용

○ 건설폐기물 물량 증·감 발생

- 건설중장비 운행 등으로 파손된 L형측구(L=152m) 깨기 물량 증가와 아스팔트 포장면적 감소에 따른 폐아스콘 물량 감소 반영

▹ 건설폐기물 물량 증·감 내용

종 별	구분	전체			2차			비 고
		당초	변경	증·감	당초	변경	증·감
폐아스콘	㎥	186	123	-63	186	123	-63
	Ton	437	290	-147	437	290	-147
폐콘크리트	㎥	428	455	27	395	422	27
	Ton	984	1,047	63	908	971	63

※ 폐아스콘 발생량 290톤 중 217톤은 재생아스콘 사용으로 무대처리

- 용역비 증·감 : 감)1,382천원

구 분	당 초	변 경	증·감
전 체	39,918,000	38,536,000	감) 1,382,000
2차분	37,495,000	36,113,000	감) 1,382,000

□ 설계변경 근거

○ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제14장 용역계약 일반조건 “6(과업내용의 변경과 계약금액 조정)-3(그밖에 계약내용의 변경으로 인한 계약금액의 조정)”의 규정에 해당되는 설계변경 사항

□ 소위원회 개최

○ 일    시 : ’20. 4. 17.(금) 13:30

○ 기    간 : 시설관리부 회의실

○ 심사위원

- 팀 장 : 시설과장 송병욱

- 팀 원

소 속	직급	성명
누수방지과	시설6	최성태
시설과(시설관리팀)	시설6	임춘길
시설과(시설팀)	시설6	김형식
	시설6	박상권
	시설7	박건수

붙 임 : 실정보고 관련 서류 1부.  끝.