코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	용역 준공기한 변경의뢰

하천관리과-6123호(2020.4.20.)와 관련입니다.

2.「복개하천 중심의 하천복원 종합계획 수립용역」에 대하여 아래와 같이 용역 준공기한 변경계약을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용역개요

1) 용 역 명 : 복개하천 중심의 하천복원 종합계획 수립용역

2) 계약기간 : 2018.06.14. ~ 2020.4.30

3) 계약금액 : 일금오억육천팔백사십만원정(￦ 568,400,000원)

나. 준공기한 연기 내용

구 분	과업기간	계약금액	비고
당 초	’18.6.14. ~ ’20.4.30.	568,400천원	용 역 비 변동없음
변 경	’18.6.14. ~ ’20.6.30.

붙임 : 1. 방침서(준공기한 연기 보고) 1부.

2. 준공기한 연기 의뢰서 1부.

3. 용역사 공문(기간연장 및 합의각서) 1부.  끝.

	하천관리과장
★주무관	이석희		하천계획팀장	이승우		하천관리과장	04/20 한유석
협조자
시행	하천관리과-6137	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 서소문별관8층(하천관리과)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3885	/전송	02-2133-1044	/		/	부분공개(5)