문서번호	역사도심재생과-4550
결재일자	2020.4.22.
공개여부	부분공개(5,7)
방침번호

		시 민
주무관	도심계획팀장	역사도심재생과장
이기윤	배성호	04/22 조남준

********************교통영향평가 및 전략환경영영향평가 용역

준공기한 연기 검토 보고

2020. 4.

********************교통영향평가 및 전략환경영영향평가 용역

준공기한 연기검토보고

□ 용역개요

○ 용 역 명: ********************교통영향평가 및 전략환경영향평가 용역

○ 과업기간: 2019. 4. 12. ~ 2020. 4. 30.

○ 계약금액: ************************

○ 계약업체: *****************

○ 주요 과업내용 : 지구단위계획수립에 따른 교통영향개선대책 수립 및 전략환경영향평가 보고서 작성

□ 추진현황

○ `19. 4. 12.  계약 체결 및 용역 착수

○ `19. 8. 02.  전략환경영향평가 평가항목․범위 등의 결정내용 공고

□ 변경내역

○ 준공기한: 당초 `20. 4. 30. ⇒ 변경 `20. 12. 31.

○ 귀책소재: 서울특별시

○ 지체상금 부과 여부: 미부과

○ 연기사유

- 코로나19 국내발병 및 확산으로 인해 경희궁 주변 지구단위계획 수립 관련 열람공고 및 관련부서 협의 등 절차 추진 및 계획결정 지연에 따른 과업기간 연장 필요

□ 향후계획

○ 준공기한 연기 의뢰 (재무과)

붙임  1. 준공기한 연기의뢰서 1부.

2. 계약기간 연장 공문, 변경공정표 및 합의각서 1부.  끝.