문서번호	소방행정과-4073
결재일자	2020.4.22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
담당자	장비회계팀장	소방행정과장		소방서장
진형석	김인철	代정승원		04/22 김재학
협 조

양천소방서

신트리119안전센터 태양광 발전설비 설치 계획

2020. 4.

양천소방서

(소방행정과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

ISO 37001(반부패경영시스템) 실천 체크리스트
☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
항목 (9개항목 요약)	중점관리대상 부패리스크 점검사항	검토완료	해당없음	비 고
인사	● 공정한 인사 및 근무평가를 위하여 검토하였습니까? 예) 자체 인사관리 및 평가기준안 설정, 인사고충 위원회 운영 등	□	■
복 무	● 비번근무자의 불필요한 초과근무 개선을 위하여 검토하였습니까? 예) 복무규정 및 초과근무수당 지급기준 준수 등	□	■
근무기강	● 부적절한 용어 사용 및 동료간 갈등 유발사항을 검토하였습니까? 예) 부적절한 언행, 성희롱, 비하 발언 금지, 여성고충 상담관 제도 운영 등	□	■
계약	● 계약체결시 투명한 절차를 수행하였습니까? 예) 공사, 용역, 물품 구매시 전자공개계약 등	■	□
예산집행	● 예산집행시 필수 확인사항을 검토하였습니까? 예) 규정 및 증빙자료 확인, 적정한 예산항목 사용 여부 등	■	□
	● 부당 수령 또는 지급 부적정 사례가 있는지 검토하였습니까? 예) 수당, 여비 지급 등 관련서류 확인	□	■
대외민원	● 신속하고 정확한 민원처리를 수행하였습니까? 예) 법률 검토, 협의 회신 및 증명발급 처리기한 단축 등	□	■

신트리119안전센터 태양광 발전설비 설치 계획

태양광발전은 온실가를 줄이는 저탄소(低炭素)녹색성장에 필요한 기반을 조성하고 새로운 성장동력으로 활용함으로써 삶의 질을 높이고 녹색성장에 기여하고자 함.

Ⅰ		관련근거

□  녹색에너지과-8917(2020.3.30.)호『2020년 공공시설

신재생에너지 지역지원사업 예산 재배정 및 교부 알림』

Ⅱ		사업개요

□  일반현황

❍ 사업대상 : 신트리119안전센터(內)

❍ 위    치 : 서울특별시 양천구 신정로 238

❍ 준공년도 : 2008. 3. 4.

❍ 건물규모 : 철근콘크리트구조 3/1층 연면적820.27㎡(대지 793.20㎡)

□  태양광발전설비  사업개요

❍ 사 업 명 : 신트리119안전센터 태양광 발전설비 설치

❍ 설치위치 : 신트리119안전센터 옥상

❍ 시설용량 : 9kw

- 주요시설 : 태양광 발전 모듈, 태양광 발전전원 접속함, 인버터 등

❍ 사업기간 : 2020. 4. 20. ~ 2020. 7. 20.(3개월)

※ 성능시험완료일 기준

□  예산현황

[단위 : 천원]

사 업 명	예산과목	예산액
계	공공시설 신재생에너지 보급-지역지원	22,340
신트리119안전센터 태양광 발전설비 설치		22,340

※ 국비 : 10,053천원 / 시비 : 12,287천원

Ⅲ		태양광 발전설비 시스템 구성

□  태양광 발전설비 시스템 및 설치 규모

종류	타입	용량	세부내역	설치장소		전력사용량(연간)
태양광 발전	고정식	9kw	모듈 380W 24장 (인버터 11kW)	방 위	위 치	55,106kwh (2019년도)
				북위 37 동경 126	옥 상

□ 태양광 발전설비 시스템 회로도

※ 태양광이란 → 태양전지를 이용하여 무한정 무공해의 태양광에너지를 전기에너지로 직접 변환하는 장치로써 햇빛이 있는 곳이면 어느 곳에서나 간편하게 설치하여 전기를 생산할 수 있는 차세대 에너지원이다.

□ 연간 예상 생산 용량 산출 내용

▸ 연간 태양광 평균 생산시간 : 3.6시간(1일)
▸ 9kw는 1시간에 9kw를 생산할 수 있다는 생산 능력 3.6시간기준으로

하루 9kw x 3.6h = 32.4kw가 생산 가능
※ 연간 발전량 추정 계산 : 32.4kw x 365일 = 11,826kw 생산예측

☞ 신정센터 2019년도 전기사용량 55,106kwh / 태양광생산량 11,826kwh(21.5%)

Ⅳ		발주계획

□ 사 업 비 : 22,340천원

❍ 항목별 발주계획

[단위 : 천원]

항목	개요	소요예산	발주방법	관련규정	비고
합계		22,340
태양광 발전장치 (관급자재)	◊태양광발전장치(9kw) - 태양광발전장치 지지대	20,250	조달구매	조달사업에 관한 법률 시행령 제17조
태양광 발전설비 전기공사	◊인버터측 전기 배선 등 - 2차 측 계통 연계	1,440	전자수의 계약	전력기술관리법 제12조
모니터링시스템	◊서울시 통합모니터링 시스템 연동	650	전자수의 계약	지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 25조

Ⅴ		추진일정

□ 태양광 발전설비 설치

❍ 2020. 4. : 태양광 발전설비 관급자재 조달구매 발주

❍ 2020. 4. : 태양광 발전설비 전기공사 발주

❍ 2020. 4. ~ 6. : 공사시행 및 준공

❍ 2020. 7. : 성능시험 완료

Ⅵ		기대효과

□ 태양광 설치로 저탄소 녹색성장에 기여

❍ 미세먼지 및 온실가스 배출이 없고 소음이 전혀없는 무제한의 태양에너지를 이용하여 전기생산.

❍ 한번 설치하면 최소의 유지비용으로 미래를 생각하는 대체 에너지로 적합함.

붙 임  태양광설비 설치·관리 업무매뉴얼[2019.10.1.개정] 1부.  끝.