문서번호	토목부-8214
결재일자	2020.4.23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
이상근		최진우	04/23 김용제
협조

임시 진·출입로 조성에 대한 검토 보고

[신림공영차고지(저류조 포함) 조성공사]

2020. 4.

도시기반시설본부

(토 목 부)

임시 진·출입로 조성에 대한 검토 보고

[신림공영차고지(저류조 포함) 조성공사]

공영차고지 진입도로의 지장물(양봉장) 이전 및 토지 보상 지연으로 당초 계획된 진입도로 조성이 불가하여 진입도로 편측으로 임시 진입도로를 조성하고자 검토 보고 드림.

****************************************************

Ⅰ		관 련 근 거

○ 신림차고지(감) 제2020-075호('20. 4. 13.) : 실정보고(임시 진·출입로 조성)

Ⅱ		공 사 개 요

○ 공 사 명 : 신림공영차고지(저류조 포함) 조성공사

○ 위    치 : 서울시 관악구 신림동 140-2 일원

○ 규    모

- 주 차 장 : 버스 101대 (지상, 지하1층)

- 저 류 조 : 빗물저류조 1개소(V=35,000㎥, 지하2층)

○ 공사기간 : 2018. 10. 01.~2021. 09. 29.

○ 도 급 비 : 22,918백만원

○ 시 공 사 : 삼영종합건설(주) 외 2개사

○ 감 리 사 : ㈜제일엔지니어링 외 2개사

Ⅲ		건설사업관리단 보고내용

○ 당초 계획된 공영차고지 진입도로에 지장물(양봉장) 및 토지 보상 지연으로 진입도로 공사를 할 수 없는바, 진입도로 구간의 토지 보상 완료 구간과 도로점용 허가를 받은 서울시 부지 일부를 사용하여 공사용 도로 조성이 필요하고 추가로 발생된 임시도로 하부 흄관의 관보호 콘크리트 및 입구부 아스콘 포장을 위한 아스콘은 소량으로 공사 시급성을 감안하여 사급으로 구매가 필요함.

○ 지장물 현황

임시 진출입로

(콘크리트 포장)

진·출입로

(아스콘 포장)

기존 콘크리트 포장 활용

○ 주요 수량 변경 현황

구 분	단 위	수 량			비 고
		당 초	변 경	증·감
무근콘크리트 깨기	㎥	27	361	증)334
횡배수관(D=450mm)	m		40	증)40
보조기층 포설 및 다짐	㎥		138	증)138
콘크리트포장	㎡		691	증)691

○ 공사비 증·감 현황

(금액단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
******	*******	**********	************
*****	*******	**********	************
*****	*******	**********	************
*****		**********	***********
****	*******	**********	************

Ⅳ		조 치 의 견

○ 본 공사의 조속한 공사 시행을 위하여는 공사장 진입도로 개설이 필요한바, 상기와 같이 임시 진입로 조성은 적정하다고 사료되므로 공사  시행후 설계변경을 시행 하고자 합니다.

붙임 : 감리단 검토의견서 및 내역서 1부.  끝.