문서번호	도로보수과-2098
결재일자	2020.4.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
공무직		주무관	도로보수과장
정원근		유진석	04/23 이수범
협조
	주무관		민병훈

도로굴착신청 현장조사서-전기4

2020. 4

도로보수과

명에 의거 도로굴착승인 신청에 따른 현장조사 결과를 다음과 같이 복명합니다.

신청자	주 소		서울특별시 중구 남대문로 92
	성 명		한국전력공사 서울지역본부(전력사업처)(유지곤)
굴착 위치			광진구 중곡동 612-8 ~ 중곡동 649-5
굴착 목적			군자역 동일로 지중화공사(동일로 A-1)
포 장 별			굴착폭(m)	연장(m)	면적(㎡)	비고(복구)
손 궤 규 모	계		1.2~3.5	1,000	2,350	전기관로공사 규격(D=175mm✳7공, H=1.5m) (공사기간 : 5.01 ~ 7.31)
	아스팔트	소규모 포장	1.2	500	600
		평삭 포장	3.5	500	1,750
	보도
	기타
위 치 도
조사자 의견	광진구 동일로62길 한전지중화공사로 지상개폐기 및 변압기 설치공간 부족으로 천호대로 차도 관로굴착 및 보도상에 지상개폐기 및 변압기 설치하는 한전공사임. 2. 편도5차로중 4차로 관로굴착 및 5차로 분기연결(13개소)공사로 도로평탄성 불량 예상됨으로 공사완료후 4~5차로 2개 차선 차로단위포장공사 필요. 3. 한전관로(7공)주변에 충분한 다짐작업이 필요.(관리청 복구) 4. 공사기간을 11월 20일 변경 및 굴착은 9월부터 조정필요.

위 치 : 천호대로(군자역1번출구앞 ~ 군자교교차로전)

D=175mm, L=500m

2020. 4. 22

보 고 자  실무관 정 원 근