문서번호	도시농업과-6933
결재일자	2020.4.22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
★사무관	도시농업지원팀장	도시농업과장		경제일자리기획관
주성호	이보형	代한광모		04/22 신종우
협 조

농업공화국 전시설계 용역계획

2020. 4.

경제정책실

도시농업과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	■	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	■	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	■	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	■	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

농업공화국 전시설계 용역계획

농업공화국의 조성(건축)계획을 연계하여 완성도 높은 농업복합시설을 조성하기 위해 공간디자인 설계 용역을 추진하고자 함

Ⅰ. 추진배경 및 근거

□ 추진배경

○ 농업공화국의 현상 설계 공모 당선작 선정(’19. 4.)에 따라 설계용역 중으로 이와 연계한 공간의 효용성 극대화를 위한 전문회사의 디자인 설계 필요성에 대한 설계자문위원회의 의견

□ 추진근거 및 경과

○ 농업공화국 조성 기본계획 수립(도시농업과-14422호)	’18.9.19.

○ 설계용역계약 및 설계 착수보고	’19.7.

○ 서울시 경관심의 및 강서구 건축심의	’19.12.~’20.1.

○ 설계관련 자문회의(7차)	’19.7.~’20.3.

Ⅱ. 조성 개요

□ 사업위치: 강서구 마곡동813(서울식물원 옆)

□ 사업기간: 2017. 1.~2022. 5.

□ 부지면적: 11,817㎡

□ 건축규모: 지하2층, 지상2층

○(건축면적) 2,340㎡  (연면적) 11,194㎡

□ 총사업비: 86,205백만원

□ 주요시설: 농업전시관, 실습·체험장, 다목적교육장, 씨앗도서관 로컬푸드레스토랑, 오픈키친/카페, 농산물판매장 등

Ⅲ. 용역추진계획

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 농업공화국 조성 전시(기본+실시)설계 용역

○ 용역기간 : 계약일로부터 12개월

○ 소요예산 : 211백만원

○ 계약방법 : 제한경쟁입찰(협상에 의한 계약)

○ 입찰참가자격 : 공고문 참조

① 「산업디자인진흥법」에 의한 산업디자인전문회사(환경디자인 분야 또는 종합디자인 분야)로 신고한 자로서 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정에 의하여 나라장터에 산업디자인전문회사(종합디자인분야, 업종코드 : 4444) 또는 산업디자인전문회사(환경디자인분야, 업종코드 : 4442)로 입찰참가 등록한 자

②「건설산업기본법」제9조(건설업 등록 등)에 의한 실내건축공사업 등록한 자

③「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」제9조(직접생산의 확인 등)에 따라 직접생산확인서(실물모형-세부품명번호 : 6010989901)을 소지한 자

※ 대표사 포함하여 5개사 이내에서 공동수급 가능

□ 과업범위

○ 내용적 범위 : 농업복합공간의 전시 시나리오 구상 및 교육·행사 구상, 전시(기본+실시)계획 수립 및 설계 도면작성, 산출내역서 작성 등

○ 공간적 범위 : 부지 11,817㎡, 건축연면적(지상2층, 지하 2층) 11,194㎡

시설분류	면적(㎡)	세부 시설 내역
전시공간	1,565	씨앗은행, 농업전시장(1,2), 스마트팜1,2(아쿠아포닉스 등 미래형 농업시설 포함) 원예치유체험실, 기획전시실
교육실습공간	1,563	농업도서관, 다목적교육장, 중교육장, 버섯농장, 농부식당, 농부학교1,2, 공동작업실, 농부창고 샤워/탈의실, 목공실, 부속회의실, 전용휴게공간
판매보급	614	로컬푸드레스토랑, 농산물판매장, 로컬농산물판매장, 농부쉼터, 전망카페
지원시설	7,452	지하주차장, 공용면적(지하1,2, 지상1,2), 사무실, 회의실, 방재실, 창고 용역원실, 홍보관
동식물시설 (전시설계 제외)	2,497	옥외텃밭, 옥상텃밭 등 ※ 전시설계 제외하되 전시기본계획상 상호 연계 운영부분 반영 필요 - 논 682.18㎡, 텃밭 647.66㎡, 계단식 텃밭 886.92㎡, 옥상텃밭 280.12㎡

※ 위는 건축 설계용역의 추진 중간단계의 현황으로 완료시까지 계속 변경될 수 있음

□ 주요 과업내용

○ 농업공화국 조성 운영 미션을 반영한 전시방향 및 기본+실시계획 수립

○ 전시별 전시 콘텐츠 선정 및 공간 구성

○ 전시 시나리오 및 연출방안 구상

○ 전시기본 및 실시 설계 도면, 산출내역, 설계 예정가격서 등 작성

과업 요지

○ 농업공화국 전시 기본 방향

기본방향	영 역	세 부 내 용
농업을 알리다	전시	•서울 농업의 역사와 지역 전통문화를 이어주는 서울농업 플랫폼 •과거, 현재, 미래농업관(전시관, 갤러리, 수직농장, 아쿠아포닉스 등)
	정보	•미래농업 정보, 교육 및 체험 프로그램, 과학영농 등 DB구축 •농업기술, 종자(품종), 국내 및 해외농업 동향 등 정보전달
	홍보	•지역 홍보관(농특산물, 관광자원, 축제, 문화콘텐츠 등) 운영 •농업의 다원적 가치와 중요성 홍보
사람을 키우다	학습	•연령별, 테마별, 단체유형별 프로그램 운영 •안전한 먹거리, 식량안보, 농업의 다원적 가치(환경, 산업, 문화 등) 교육 •스쿨팜 모델, 절기와 농업 등 교육프로그램 운영
	체험	•도시농업 체험의 장, 공방, 요리, 토피어리, 원예치유 체험 등 •도시농부홀, 체험텃밭, 농업도서관, 다목적 교육장 등 활용
사람을 연결하다	참여	•세대, 지역, 도시와 농촌을 연결하는 소통의 장으로 활용 •도시농업 협동조합, 단체 육성
	지원	•도시농업관련 교육 및 회의, 전시, 간담회 등 지원
	판매	•지역농특산물 상설․전시판매장, 로컬푸드 레스토랑, 카페 등 •도시농부 생산 농산물 판매, 농부의 시장 등 도농상생 공간

○ 전시 기본 방향에 따른 기본계획 수립

- 시설별로 주제를 효과적으로 구현하기 위한 국·내외 콘텐츠 사례조사

- 시설별 각각의 농업적 특색을 살리는 테마가 있는 구성으로 연출 구상과 효과적인 스토리 전개를 위한 공간구성 및 동선 계획

- 로비, 복도 등 공용 공간 및 외부공간의 활용 계획

- 건축 기본 및 실시설계에 따른 각 시설별 실용성과 콘셉트, 디자인 등을 연계한 계획 수립

○ 전시별 전시 콘텐츠 선정 및 공간 구성

- 건축 기본설계에 부합하도록 평면계획에 전시 공간 구획 및 전시물 배치

- 시설별 전시 및 문화행사, 교육 프로그램 등 운영을 위한 방안

- 전시 콘텐츠 순환 및 예산을 고려한 수집·제작·교체 등 관리 계획

- 농업전시관 전시물별 전시구현 방안[가상현실(VR), 증강현실(AR), 실물전시 등]

○ 실시설계를 위한 도면, 산출내역, 설계 예정가격서 등 전시 기본설계서 작성

- 전시 기본설계 도면, 연출시방서, 설계설명서, 연출매체 총괄표 작성

- 전시 실시설계를 위한 산출내역서 작성

- 실시설계서 및 산출내역서 작성

※ 별첨  참고 도서 및 문서 목록

1. 농업공화국 조성 설계 용역 중간 성과품 도서

2. 농업공화국 조성 기본계획(도시농업과-14422호, 2018.9.19.)

3. 농업공화국 조성 기본계획 수립용역(기술용역보고서)

○ 전시 및 연출 분야별 전문 인력 구성 및 설계과정 참여 운영

- 전시개념 설정을 위한 전문가(농업기술, 문화예술, 사회분야 등) 및 전시연출 매체 디자인 가능 전문가(메이커, 예술가 등) 활용

- 사업수행 기간 중 5회이상 자문회의 및 디자인 워크숍 진행, 그리고 그 결과 반영

※ 사전협의 완료된 전문가만 제안서에 제시할 것, 추후 발주처와 협의하여 변경 가능

□ 용역 성과품 납품수량

구 분		성과품 및 제출자료 종류	수량	비 고	납품기한
보 고 서 및 각종자료		과업수행 계획서 및 착공계	2부	착수 전	계약 후 10일이내
		보안대책 관련 자료	2부	착수 전
최종 성과품	기본계획	1. 전시기본계획서(2개안 이상 제시)	10부	A4	계약 후 100일이내
		2. 기본설계 도면집	5부	A3(접이식)
		3. 전시기본계획서 및 설계도서 CD 또는 usb (CAD 및 PDF 파일)	2개
	실시계획	1. 전시실시설계계획서	10부	A4	계약 후 12개월이내
		2. 실시설계 도면집	5부	A3(접이식)
		3. 전시실시계획서 및 설계도서 CD 또는 usb (CAD 및 PDF 파일)	2개

※ 성과품의 종류와 규격, 부수는 발주자의 필요에 따라 조정예정

□ 예산과목

○ 경제정책실 도시농업과, 함께하는 생활속 도시농업 환경조성, 도시농업육성 지원, 농업공화국 조성, 시설비(401-01)

Ⅳ. 향후 추진일정(안)

○ 사전규격 공개(5일)	: ’20.  4. 27. ~ 5.4.

○ 용역 입찰공고 의뢰(도시농업과 → 재무과)	: ’20.  5. 6.

○ 입찰공고(15일)	: ’20.  5. 11. ~ 5. 27.

○ 제안서평가위원회 구성 및 예비명부 작성	: ’20.  5. 20.까지

○ 제안서평가위원회 개최	: ’20.  6. 2.

○ 우선협상대상자 통보	: ’20.  6. 3.

○ 협상적격자와 기술협상	: ’20.  6. 8.

○ 용역계약 의뢰(도시농업과 → 재무과)	: ’20.  6. 10.

○ 용역 수행(약 12개월)	: ’20.  6. ~ ‘21. 6월

붙임 : 1. 제안요청서 1부.
2. 과업내용서 1부.
3. 입찰공고서 1부.
4. 산출기초조사서 1부.  끝