문서번호	지역돌봄복지과-8076
결재일자	2020.4.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	복지시설팀장	지역돌봄복지과장
박슬기	서해경	04/24 하영태

종합사회복지관 기능보강사업 변경 계획(안) [길음]

2020. 4

복 지 정 책 실

(지역돌봄복지과)

종합사회복지관 기능보강사업 변경 계획(안) [길음]

2019년 기능보강사업 중 길음종합사회복지관(성북구)의 사업 계획 변경 요청에 따라 검토 하여 승인하고자 함

□ 요청사항

◯ 2019년 종합사회복지관 기능보강사업 계획 변경 신청

(성북구 복지정책과-8634, 2020.4.1.)

◯ 시 설 명 : 길음종합사회복지관

◯ 사 업 명 : 길음1재정비촉진지역 주택재개발 정비사업에 따른 신규이전 기능보강사업(가전, 가구, 주방장비, 방송·음향) 4건

◯ 요청내용 : ************************************

□ 사업변경 신청사항

◯ 변경 사유

<길음종합사회복지관 신규이전 추진경과>

‣ 길음1재정비촉진지역 주택재개발 정비사업에 따른 길음종합사회복지관 신규 이전으로 2019년 중 완공 예정이었으나, 공사기간이 연장되어 연내 준공이 어려워 2020년 사업(신축 후 필요한 집기 및 장비보강)으로 명시이월 하였으며 신규 복지관은 2020. 6월 완공 예정임

※ 기능보강사업 신청(2018. 5월) ⇒ 신축 복지관 설계도면 완성(2018.11월) ⇒ 내부 공간 변경에 따른 설계변경(2019.12월) ⇒ 기능보강 사업계획 변경 요청(2020. 4월)

- 기능보강사업 장비구입 예산 신청 당시(2018. 5월)와 대비하여 조달구입 품목이 품절되었고, 신축복지관의 내부 공간 변경에 따른 설계변경 결과 설비 불가한 항목이 발생하여 품목 변경을 하고자 하며, 당초 공기청정기 구입비는 기업 등의 후원으로 수량변경이 필요한 상황이므로

- ****************** 당초 예산 *********⇒ 변경 ************************* 요청

◯ 상세 내역

(단위 : 천원)

구분	품목	당 초	변 경	증감	변경사유
1	프로그램실 가전구입	******	******	***	*************************************** **************************** **************************************************************
2	프로그램실 가구구입	******	******	***	************************************ ****************************
3	무료급식소 주방장비교체	******	******	**	***************************************************************************************** **********************************************
4	프로그램실 음향장비구입	******	******	*
총계		*******	*******	*****

□ 검토결과 : “승인”

◯ 승인내역 – ******************************

◯ 검토의견

- 2019년 기능보강사업 대상으로 시비 보조금을 교부하였으나, 당초 계획 대비 공사 지연으로 사업이 이월되어 2020년 집행과정에서 조달품목 품절, 가격변동, 신축이전 설계변경에 따른 품목이 변경되어 사업계획을 변경하고자 하며,

- 종합적으로 검토한 결과 사업계획 변경이 「서울특별시 지방보조금 관리 조례 시행규칙」제6조(보조사업의 경미한 사항)에 해당하는 총사업비 10% 미만 변경의 경미한 사항이면서 내용이 본 목적에 위배되지 않으며, ****************************으로 처리함에 따라

- 주민욕구를 충족할 수 있는 복지 공간 조성과 원활한 사업추진을 위해 사업계획 변경 승인함

◯ 총사업비 : *************************

□ 기능보강사업 변경 대비표

◯ 변경 대비표

(단위 : 천원)

사업명	기 존			변 경			증 감
	예 산		내 용	예 산		내 용
신규이전 기능보강사업 (4건)	시비	*******	***************** **************** ***************	시비	*******	**************************************	*****
	구비	******		구비	******
	자부담	*		자부담	*****
	총액	*******		총액	*******

붙 임 : 1. 자치구(성북구) 사업변경 승인요청 공문 1부.

2. 기능보강 사업변경을 위한 검토자료 일체.  끝.