문서번호	현장민원과-7648
결재일자	2020.4.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		현장민원과장
정상호		04/27 고채현
협 조	행정관리팀장		김효선
	주무관		김동건

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”

2020년 경영실적평가대비

교체장애수전 정비 추진 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 4.

2020년 경영실적평가대비

교체장애수전 정비 추진 계획

본부 경영실적평가에 대비하여 평가지표에 포함된 교체장애수전 정비목표를 달성하여 수도계량기교체 업무추진에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		근 거

□ 2020년 교체장애수전 정비 평가계획(계측관리과-3748, ‘20.4.16)

Ⅱ		개 요

□ 교체장애수전 정비 실적평가(2점)

◯ 예산집행률 1점

- 집행목표 : 집행률 90% 이상(배정예산 56,481천원)

- 평가지표 : 9월까지 예산 90%이상 집행하면 만점 부여

◯ 교체장애수전 정비실적 1점

- 정비목표 : 544개(교체장애 대상 5,443개 중 10%)

- 평가지표 : 교체대상의 10% 이상 교체 시 만점 부여

□ 교체장애수전 및 예산 현황

◯ 교체장애수전 정비 대상 : 5,443개

- 관노후(유입․유출)와 빈집이 77.4% 로 대부분임.

(단위 : 개)

구별	계	관노후	빈집	옥내배관노후	공간협소	교체거부	매몰	밸브고장	심도장애	유니언없음	장애물적치	기타
계	5,443	3,191	1,022	460	128	11	117	142	112	73	113	74
강북구	1,908	1,123	445	88	39	5	37	40	61	14	36	20
도봉구	786	308	194	42	52	3	38	49	33	28	29	10
노원구	2,749	1,760	383	330	37	3	42	53	18	31	48	44

◯ 교체장애수전 정비 예산 : 56,481천원

Ⅲ		추진경과

□ 교체장애수전 정비 계획 추진

◯ 교체장애수전 정비계회 수립 시행(현장민원과-6038, ‘20.3.25.)

- 교체장애수전 정비 전담반 운영 : 2명 1조

· 구성 : 교체전문관 1명, 기간제근로자 1명

· 장비 : 차량(임차) 및 교체장비 확보

- 기간 : ‘20. 4. 1. ~ 10.31.(9개월)

◯ 추진 실적(‘20.4.25.현재)

- 공사비 집행 : 계절적 요인으로 예산집행 없음.

- 정비실적 : 정상추진으로 목표 초과 달성 가능함.

(단위 : 개)

구 분	계	빈 집	관 노 후	심도장애	기 타
대 상	5,443	1,022	3,191	122	1,108
목 표	544	102	319	12	111
실 적	127	17	79	6	25
진 도	23.3%	-	-	-	-

Ⅳ		문 제 점

□ 공사비 집행률 저조

◯ 만기교체 중 발생하는 교체장애를 정리하지 않고 장애해소 공사요청을 하지 않아 집행률이 저조함.

◯ 교체장애 현황관리 및 정비요청은 현장민원과, 공사집행은 공사부서(서설관리과,급수운영과)로 이원화되어 있음.

□ 교체장애수전 정비 어려움

◯ 노후관인 경우 누수가 발생 할 위험이 있으며 누수발생 시에 복구에 많은 시간이 소요됨

◯ 수도계량기가 집안(목욕탕, 베란다 등)에 있을 경우 수요가를 만나지 않고 교체 불가함.

Ⅴ		추진계획

□ 공사비집행률 향상

◯ 공사부서와 유기적 협조 체계유지

- 서울시귀책 장애수전 발생 즉시 공사부서(시설관리과, 급수운영과)와  협조하여 신속한 예산집행

□ 장애사유별 대응

장애사유	주 요 내 용
➀ 노후관	• 숙련된 기술을 보유한 계량기 교체전문관이 방문하여 누수가 발생하지 않게 교체 완료 • 교체가 불가한 경우 옥내급수관개량공사비 지원내용을 홍보하여 수요가에서 노후관을 교체하도록 안내
② 빈 집	• 공가세대 2~3회 방문하여 교체 • 공휴일 계획을 세워 방문하여 교체
③ 매 몰	• 어려운 공간에서 작업할 수 있는 교체용공구 및 장비를 확보하여 교체 • 콘크리트 타설 등 현장 처리 불가 시에는 수요가에서 처리하도록 협조 및 공사부서 공사요
➃ 심도장애 및 밸브고장	• 숙련된 기술력을 보유한 직원이 계량기 교체 하거나 공사부서에 공사요청
➄ 교체거부 및 지장물	• 수요가를 만나 교체해야 하는 당위성을 설명하여 수요가 설득 후 교체 • 지장물이 있는 경우 수요가와 함께 지장물 이동 후 교체

Ⅵ		향후계획

□ 교체장애수전 정비 지속추진

○ 교체장애수전 정비 목표를 달성하더라도 요금부과의 신뢰를 위하여 지속 추진

□ 월보제출

○ 다음 달 15일까지 본부 계측관리과에 교체장애수전 월보 제출

붙임 1. 수도계량기 교체장애수전 월보 1부.

2. 경영실적평가 메뉴얼(교체장애수전) 1부.  끝.