문서번호	인력개발과-8142
결재일자	2020.4.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		인재노무팀장	인력개발과장
김자겸		김형태A	04/27 김현중
협조

- 서천연수원 객실현관문 교체공사 -

공사기간 변경 검토 보고

2020. 4.

행  정  국

[인력개발과]

서천연수원 객실현관문 교체공사 공사기간 변경 검토 보고

「서천연수원 객실현관문 교체공사」와 관련하여 현관문 자재 생산기간 연장에 따른 공사기간 부족으로 준공기한을 연장하고자 보고드림

□ 공사개요

○ 공 사 명: 서천연수원 객실현관문 교체공사

○ 시 공 자: ㈜럭키건설(대표: 권용성)

○ 계약금액: 금145,328,700원

○ 공사기간: ‘20. 3. 31. ~ ’20. 4. 29.(30일간)

□ 관련근거

○ 「공사계약 일반조건」제8절 2.

	< 계약기간의 연장 >
계약상대자는 “1-다”의 어느 하나의 사유가 계약 기간 안에 발생한 경우에는 지체 없이 제5절 “5-가-2)”에 대한 수정공정표를 첨부하여 공사감독관을 거쳐 계약담당자에게 서면 으로 계약기간의 연장을 청구해야 한다.

○ 서천연수원 객실현관문 교체공사 준공기한 연기요청

[럭키건설 2020-04-23호(‘20.04.23.)]

□ 검토내용

○ ****

- **********************************************************************

- 습식공사(현관문틀 뒷채움 미장공사 등)의 양생기간 준수 등 품질 확보를 위하여 공사기간 연장 필요

○ 현장사진

현관문 반입	문틀 시공	문틀 주위 사춤

○ 공사기간 변경

구 분	당 초	변 경	비 고
공사기간	‘20.03.31.∼’20.04.29.	‘20.03.31.∼’20.05.14.	증 15일

□ 검토의견

○ 공사기간 연장이 적정하다고 판단되므로 계약기간 변경하고자 함.

붙임 : 서천연수원 객실현관문 교체공사 준공기한 연기요청 1부. 끝.