문서번호	에너지시민협력과-3692
결재일자	2020.4.28.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관	시민참여기획팀장	에너지시민협력과장
김승준	진선영	04/28 김연지

`19년 서울시 가상발전소 운영 결과 보고

2020. 4.

기후환경본부

(에너지시민협력과)

`19년 서울시 가상발전소 운영 결과 보고

서울시 소유 건물과 시설의 전력수요자원에 참여하여 전기를 아끼고 수익을 얻는 서울시 가상발전소 사업의 실적과 수익금을 보고함

1		사업개요

○ 사 업 명 : 서울시 가상발전소 사업
○ 사업내용 : 전력거래소 □수요자원 거래시장□에 참여하여 수익 창출

○ 사업현황 : 서울시 및 자치구 공공건물 총 7,145kW 수요자원 등록

- 서 울 시 : 시 소유 20개 건물 및 사업소(총 6,345kW)

물재생센터 (4)	상수도사업본부 (6)	투자출연기관 (4)	기타건물 (6)
난지, 중랑 탄천, 서남	아리수정수, 취수센터	DDP, 보라매병원 서울시메트로9호선 세종문화회관	서울대공원	SBA 건물(3)
			시립미술관	패션비즈센터

- 자 치 구 : 자치구 청사 및 아트센터(총 800kW)

자치구	송파구	도봉구	은평구	구로구	동대문구	마포구
용량(kW)	100	100	50	50	30	30
강동구	강서구	양천구	서대문구	동작구	성북구	금천구
30	30	30	30	30	30	280

- 운영사업자 : 에넬엑스코리아, 그리드위즈, 벽산파워, 서울에너지공사

○ 연도별 수익금 : *********

비고	`15년 (7~12월)	`16년	`17년	`18년	`19년	합계
정산금 (원)	***********	***********	***********	***********	***********	*************

- 수익금은 기후변화기금으로 편입하여 에너지복지 및 효율화 재원으로 사용

2		운영결과

○ ’19년 서울시 가상발전소 전력수요감축 참여 및 절감량 현황

회차	감축일자	감축시간	참여용량 (kW)	절감량 (kWh)	비고
1회	6월 13일	16:00~17:00 (60')	6,345	5,603	감축시험
2회	11월 7일	15:00~19:00 (240')	6,345	24,304	등록시험
3회	12월 10일	17:00~18:00 (60')	6,145	2,643	감축시험
		(360')	-	32,550	-

- 감축요청은 총 3회(등록시험 포함) 발령 되었고, 총 6시간 참여함

- 수요자원 거래시장에 참여하여 총 32,550kWh의 전기를 감축하였고, 온실가스배출계수로 환산하면 이산화탄소 15tCO2 만큼 저감한 효과

○ ’19년 서울시 가상발전소(직접시설) 월별 정산금 현황

월	기본정산금 (원/kW)	금액 (원)	월	기본정산금 (원/kW)	금액 (원)
1월	6,818.34	***********	7월	7224.54	***********
2월	4,453.83	**********	8월	6718.01	**********
3월	2,588.69	**********	9월	2987.17	**********
4월	845.58	*********	10월	969.86	*********
5월	921.36	*********	11월	2639.32	**********
6월	2,470.56	**********	12월	6702.40	******

○ 수익금 : *************************************

직접시설	위탁시설		합 계
서울시	서남물재생센터	탄천물재생센터
************	***********	***********	***********

- 위탁시설은 별도 수탁 협약에 따라 운영수익 50% 배분

○ ’19년 서울시 가상발전소 시설별 실적

번호	시설명	약정량 (kW)	평균감축량 (kWh)	미이행 (회)	정산금 (원)
1	서울대공원	200	19.57	2	**********
2	보라매병원	20	59.12	1	********
3	세종문화회관	20	103.67	-	********
4	서울특별시립미술관	20	0.17	3	********
5	뚝도아리수취수센터	50	127.39	1	**********
6	뚝도아리수정수센터	50	452.92	-	**********
7	중랑물재생센터	100	276.26	1	**********
8	구의아리수정수센터	150	296.15	-	**********
9	암사아리수정수센터	1,475	-440.59	3	***********
10	영등포아리수취수센터	150	133.87	2	**********
11	영등포아리수정수센터	300	80.36	2	***********
12	서울산업진흥원	20	423.69	-	**********
13	DMC 산학협력연구센터	20	283.91	-	**********
14	DMC 첨단산업센터	20	73.28	1	**********
15	동대문디자인플라자	50	113.91	-	**********
16	서울패션비즈센터	20	-20.51	2	********
17	광암아리수정수센터	40	88.87	1	**********
18	강북아리수정수센터	800	653.03	1	***********
19	강북아리수취수센터	400	300.92	1	***********
20	난지물재생센터	50	256.27	1	**********
21	9호선 여의도변전소	60	-54.26	2	**********
22	9호선 선유도변전소	100	-101.85	2	**********
23	9호선 구반포변전소	85	-44.55	3	**********
24	9호선 신논현변전소	90	58.55	1	**********
25	9호선 노들변전소	60	-137.84	2	**********
26	9호선 등촌변전소	90	65.83	2	**********
27	9호선 공항시장변전소	100	-63.01	1	**********
28	9호선 양천향교변전소	90	-58.23	2	**********
29	9호선 차량기지변전소	15	130.98	2	********
30	서남물재생센터	1,000	952.58	1	***********
31	탄천물재생센터1	500	430.83	1	***********
32	탄천물재생센터2	200	312.65	-	**********
합계		6,345	4773.91	41	***********

3		향후일정

○ 서울시 가상발전소(위탁시설) 수익금 정산 : ’20년 4월

- 서남물재생센터, 탄천물재생센터 수익금의 50% 기후변화기금 편입

○ 수요자원거래시장 제도 개편 따른 협약서 변경 : ’20년 5월

- 자발적 DR 신설에 따른 전력시장운영규칙 변경내용 협약서 적용

○ 자치구 가상발전소 추가자원 등록시험 및 등록 : ’20년 5월 말

- 기존 참여하는 자치구 용량 조절 및 미참여 자치구 신규 참여

○ 서울시 가상발전소 사업으뜸이 시장 표창 : ’20년 6월

- 대상 : 사업의 성과에 공헌한 공무원 및 담당자 20명

○ 주상복합건물 신규 수요자원 발굴 : ’20년 9월 ~ 10월

- 전기소비패턴 검증을 통과하고 전력피크 감소가능한 건물 자원 대상

○ 약정용량 재조정 및 추가자원 시설 등록시험 : ’20년 11월

- 기존 시설을 대상으로 적정 용량 산정 후 용량 변경 등록

- 자치구 소유 청사 및 시설 자원 등록

붙임 1. 2019년 서울시 가상발전소 참여실적 1부.

2. 서울시 및 자치구 가상발전소 수요자원 현황 1부. 끝.