문서번호	정수과-843
결재일자	2020.4.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	광암아리수정수센터소장
이승열		방진표	04/28 박동규
협 조	정수시설과장			남효돈
	주무관			지동성
	주무관			송재홍
	주무관			박종민
	주무관			신중선

유해화학물질 취급시설 정기검사 대비 개선 계획

2020. 4.

광암아리수정수센터

(정 수 과)

컨설팅 용역 보고

유해화학물질 취급시설 정기검사 대비 개선 계획

2020년 유해화학물질 취급시설 정기검사 대비 컨설팅 용역 결과 시설개선 사항이 있어 다음과 같이 조치하고자 합니다.

※ 컨설팅 : 2019. 8월 화학물질관리법 개정관련 정기검사 대비 시설기준 적정여부 조사

Ⅰ		컨설팅 시설점검

□ 점검기간 : 2020. 3. 4 ~ 3. 30

□ 점검대상 : 가성소다, 염소, 과산화수소 취급시설

□ 점검기준 : 화학물질관리법 제24조(정기검사) 관련시설 설치기준

□ 점 검 자 : 컨설팅 용역업체 ㈜오에스엘이엔지 직원2명, 담당자1명

Ⅱ		컨설팅 보고회

□ 일    시 : 2020. 4. 22.(수)  13:30 ~ 15:30

□ 내    용 : 유해화학물질 시설기준 안내 및 개선방법 설명

□ 장    소 : 본관 2층 회의실

□ 참 석 자 : 업무 담당자 5명, ㈜오에스엘이엔지 직원 2명

□ 보 고 자 : ㈜오에스엘이엔지 ******

□ **********

시설명	********					**
	**	**	**	**	**
가성소다	**	**	*	*	*	**
염 소	*	*	*	*	*	*
과산화수소	*	*	*	*	*	**
계	**	**	*	*	*	**

□ 세부내역

연 번	시 설 명		****	분야
1	가성소다	희석탱크 36톤	********** ************** ****************** ****************** ************** ************** ************** ***********	기계 기계 기계 기계 시설 시설,전기 시설 화학
2	가성소다	저장탱크 220톤×2개	*************** ******************** *********** ********* *********************** ***************** ***************** ****************** ************** ************* *************** ***************** ************ ************* ************* *********** ************** ************** ******************	기계 기계 기계 시설 전기 기계 기계 기계 시설 전기 시설 기계 시설 기계 시설 시설 기계 시설 토목

연 번	시 설 명		****	분야
3	가성소다	보조탱크 3톤	****************** ************* ************ ************ *********** ***************** *********** ************	기계 기계 기계 기계 화학 전기 기계 기계
4	염 소	염소실동	************ ********** *********** ********** **********	기계 기계 가스 시설 가스
5	과산화 수소	저장탱크 5톤×2개	********* ******************* ******************* ************** ************ **************** ************ *************** ***************** *****************	기계 기계 기계 전기 기계 시설 시설 화학 시설 전기

Ⅲ		개선계획

□ 사 업 명 : 2020년 유해화학물질 취급시설 정기검사 대비 시설 개선

□ 기    간 : 2020. 5월 초  ~ 2020. 10. 30

□ 대    상 : 세부내역 붙임 1

□ 방    법 : 개선 시 세부사항 컨설팅 업체와 협의 후 실시

설계내역서

사전 검토

( 제품성능

규격인증 )

⇨

시설개선

⇨

준공전 사전검사

( 시설기준

적합 여부

인증서류 구비)

⇨

준공처리

□ 조치결과 : 유해화학물질 취급시설 개선결과  정수과로 제출

- 전, 후 사진, 규격 인증서, 정기검사 구비서류(붙임2 참고)

Ⅳ		향후일정

□ 취급시설 개선 시설과 요청  : 2020. 4월 말

□ 유해화학물질 취급시설 개선 완료 : 2020. 10월 말까지

□ 한국가스안전공사 정기검사 예정 : 2020. 11월 초

- 당초기한 : 2020. 6. 14 ( 전, 후 30일 이내)

- 기한변경 : 코로나19 사태에 따른 정기검사 한시적 연기

- 변경근거 : 환경부 화학안전과 지침 시달(‘20.4.14)

(한강유역환경청 홈페이지 정보마당 2020. 4. 17 게재 NO1596)

□ 정기검사 완료 후 컨설팅 용역 최종보고 : 2020. 12월 중

□ 컨설팅 용역 준공 : 2020. 12월 말

※ 상기일정 한국가스안전공사 정기검사 일정에 따라 변경 될 수 있음

붙 임 1. 컨설팅 시설개선 대상(사진) 1부.

2. 정기검사 구비서류 요청 목록 1부.

3. 컨설팅 보고회 참석자 명단 1부. 끝.