문서번호	설비부-6183
결재일자	2020.4.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		환경설비과장	설비부장
김문호		김오열	04/28 임정규
협 조

『시립동대문 실버케에센터 건립 통신공사』

실정보고 사항 검토보고

2020. 4.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『시립동대문 실버케어센터 건립 통신공사』

실정보고 사항 검토보고

「시립동대문 실버케어센터 건립 통신공사」와 관련하여 공종 변경 및 설계보완(전관방송, CCTV 설치)실정보고에 대하여 검토하고 보고드림.

Ⅰ		관 련 근 거

◌ 시립동대문 실버케어센터 건립공사 정보통신 공사 실정보고

〔PC20(동대문 실버케어)-170(2020.4.21.)호〕

◌ 설계도서 검토 회의록(2019.12.26.)

Ⅱ		공 사 개 요

◌ 공 사 명: 시립동대문 실버케어센터 건립 통신공사

◌ 공사위치: 서울시 동대문구 답십리동 553외 1

◌ 공사내용: 지하1층/지상4층, 연면적 2,990.95m2, 노유자시설

- 주요설비: 통합배선설비, 비상벨설비, 구내방송 및 통신설비 등

***************************************************

*********************************************

*******************************

***********************

**********************

Ⅲ		실정보고 내용

□ 변경내용

◌ 매입전선관 종류 변경(HI-PVC전선관 → CD 전선관)

◌ 전관방송 및 CCTV 관급 공사 추가 반영에 따른 배관 및 배선공사 누락분 추가 반영

□ 주요 변경내역

구 분		당 초	변 경	증감액(원)	비 고
******	** **	****************	**************	********	****
		****************	**************
******	** **	****************	**************	********	*
		****************	**************
*****	** **	****************	**************	**********	*
		****************	**************
**********		****	****	*	****
****	** **	***	**************	***********	*********
		*	************
		*	*******
		*	**********
****	** **	*	**************	**********	*
		*	*************

◌ 물품단가: 적용단가에 낙찰률(87.745%) 적용

◌ 건설임금: 2020년 노임단가에 낙찰률(87.745%) 적용

◌ 개략 공사비 증감 현황

구 분		당 초	변 경	증・감	비 고
**	***	**********	**********	**********
	***	**********	***********	***********
	****	**********	**********	**********
	*****	*********	*********	*********
	****	**********	**********	**********
	*****	***********	***********	***********	******

□ 건설사업관리기술자 검토의견

◌ 시공사의 실정보고 사항을 검토한 결과 본 공사를 효율적으로 시공하기 위한 통신 배관 변경은 적합하며, 전관방송 및 CCTV 설비 공사에 필요한 배관 및 배선 누락분에 대한 추가 반영은 타당함

Ⅳ		보고자 의견

*******************************************************************************************************************************************

********************************************************************************************************************************

붙임  건설사업관리기술단 공문 1부.  끝.