투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(매립전선관 변경 관련 실정보고 반려 통보)

1.업무지시현장: 시립동대문 실버케어센터 건립 전기공사 (주)성보전기, 시립동대문 실버케어센터 건립 전기공사 주식회사 펨코엔지니어링 건축사사무소

2.작 성 일 자: 2020-04-28 14:04:28

3.지 시 내 용

가. PC19(동대문 실버케어)-192(2020.4.23.)호와 관련입니다.

나. 시립동대문 실버케어센터 건립 전기공사 중 발생한 설계변경(슬라브 매입 전선관의 종류 변경)에 대한 실정보고와 관련하여 아래와 같은 사유로 반려하오니 계약서 내역(경질비닐전선관)을 변경없이 반영하여 시공에 만전을 기해주시기 바랍니다.

○ 반려사유: 「공사계약일반조건」제19조(설계변경 등)에 의한 설계변경 사유에 해당없음.  끝.

※ 본 기안은 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는 문서로, 결재 완료 시 One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송처리 됩니다.

※ 업무지시전 내용 수정을 원하는 경우 One-PMIS로 반송 후 One-PMIS에서 재작성을 해주시기 바랍니다.

주무관							김문호			환경설비과장					04/28 김오열
협조자
시행			설비부-6202									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층															/			http://infra.seoul.go.kr/
전화								/전송								/													/	부분공개(5)