문서번호	급수운영과-6665
결재일자	2020.4.28.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장		남부수도사업소장
김태승	이일로	이용구		04/28 박영준
협 조
	주무관		代박창남
	주무관		서장원

준공기한 연기 보고

[시흥동 999번지 일대 외 3개소

배급수관 정비공사]

2020. 4.

남부수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	□	■
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

준 공 기 한  연 기  보 고

본 공사는 시흥동 999번지 일대 외 3개소 배급수관 정비공사로 절대공기 부족으로 공사기한 연기하고자 보고 드림.

▢ 공사현황

○ 공 사 명 : 시흥동 999번지 일대 외 3개소 배급수관 정비공사

○ 공사개요 : D=200~300mm, L=1,609m

○ 도 급 비 : 554,310,500원

○ 계약상대자 : 비상개발(주) 대표 서 희

○ 감 독 자 : 서울시설공단 공사감독2처 강진혁

▢ 연기요청 기간

○ 당   초 : 2019. 9. 18 ~ 2020. 5. 6.

○ 변   경 : 2019. 9. 18 ~ 2020. 5. 20 (14일 연기)

▢ 보고내용

○ 공사추진 현황

- 완료 공정 : 전 구간 관부설 완료

- 잔여 공정 : 자재반납, 설계변경 심의 절차

○ 준공기한 연기 사유

-설계변경 증액이 발생하여 본부심의 일정 절대공기 부족: 14일

○ 증액사유

가. 당초 누락된 수량 다수 반영

- 4구간 직관부 토공연장 221m→352m

- 잔토처리 물량 반영 및 증가

- 인입관 토공 반영

- KP이탈방지압륜 접합공 등 부설공 누락 수량 반영

- 사급자재(환토재, 가정인입관 등) 물량 반영

나. 부설 수량 증가

- 계약수량: 1,421m(설계수량 1,609m) → 변경: 1,732m

- 하수하월 및 지장물 다수로 인한 이형관 부설량 다수 증가

- 추가 공기밸브, 중간밸브 설치

다. 신규공종(라인스토핑) 발생

▢ 조치의견

○ 위 사유로 작업이 지연되었으며 자재반납 및 설계변경 등의 행정처리 기간을 고려하여 14일 준공기한 연기함이 적정함.

○ 준공기한 연기

구 분	준공기한 변경	지체상금부과여부	귀책사유
당 초	‘19. 9.18~‘20. 5.6.	미 부 과	남부수도 사업소
변 경	‘19. 9.18~‘20. 5.20.

붙임문서 : 관련문서 1부. 끝.