문서번호	시설보수과-3704
결재일자	2020.4.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
윤동원		박병연	04/29 박문희
협조
	관리단속과장		박종윤

차량방호울타리 설치공사 발주 계획

(개화지하차도외 5개소 )

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 4.

차량방호울타리 교체공사 발주계획

2020년 예산사업으로 시행예정인 『개화지하차도외 5개소 차량방호울타리 교체공사』에 대한 발주계획을 보고 드림

Ⅰ		발주개요

○ 공 사 명 : 개화지하차도외 5개소 차량방호울타리 교체공사

○ 대상시설 : 개화지하, 노들길지하, 구로지하, 서울교접속교, 신정교접속교, 화곡고가

○ 사업개요 : 고재처리 17,854㎏, 콘크리트 단면보수 68㎡, 기타 부대공 1식

○ 사 업 비 : 704,192천원(지하차도 524,192천원, 교량 180,000천원)

(도급비 89,930천원, 관급비 611,000천원, 이전비 3,262천원)

○ 사업기간 : 착공일로부터 120일간

○ 하자담보책임기간 : 준공검사일로부터 2년

Ⅱ		추진사항

○ 2017년 도로시설물 안전감사실태 점검 지적(2017.10.20.)

○ 도로시설물 안전관리실태 감사결과 조치계획 통보(도로시설과-14931)

- 단계별 우선순위에 따라 교체공사 시행

○ 2020년 정비대상 예산반영 : 713,792천원

- 도로시설과: 533,792천원(개화지하차도외 1개소 차량방호울타리 교체)

- 교량안전과: 180,000천원(신정교접속교외 1개소 차량방호울타리 교체)

○ 계약심사 완료(2020.4.16.)

○ 관급자재 구매(현장 설치도) 요청 – 다수공급자계약 2단계경쟁 제안공고

Ⅲ		세부추진계획

□  입찰방법 : 전자공개수의계약(지역제한)

○ 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제5호 가목(건설산업기본법에 따른 전문공사로서 추정가격이 1억원 이하인 공사)

□  입찰참가자격

○ 건설산업기본법 시행령 제7조에 의한 시설물유지관리업 등록업체

○ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제13조 및 동법시행규칙 제14조 규정에 의한 참가자격을 갖추고, 입찰공고일전일부터 입찰일(낙찰자는 계약체결일)까지 주된 영업소가 서울특별시에 소재한 자.

□  예산과목

○ 도로시설과, 도로시설관리, 지하차도시설관리, 개화지하차도외 1개소 방호울타리 보수, 시설비 및 부대비, 시설비(524,192천원, 도급59,930천원)

○ 교량안전과, 교량관리, 일반교량관리, 신정교 접속교외 1개소 차량방호울타리 교체, 시설비 및 부대비, 시설비(180,000천원, 도급30,000천원)

Ⅳ		향후계획

○ 2020. 4월 : 발주 및 공고

○ 2020. 5월 : 계약 및 착공

○ 2020. 9월 : 준공.  끝.