문서번호	기전과-2396
보존기간	년
결재일자	2020.4.29.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

주무관		기전과장	남부도로사업소장
김해중		임태수	04/29 변봉섭
협 조
	주무관			조소현

염곡지하차도 조명 개선공사

설계변경검토보고

2020. 4

남부도로사업소

(기  전  과)

염곡지하차도 조명 개선공사

설계변경검토보고

염곡지하차도 조명 개선공사 공사와 관련하여, 시공업체로 부터 설계변경 요청이 있어 검토하고 보고드림.

□ 관련근거

❍ 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령

- 제74조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)

❍ 염곡지하차도 조명 개선공사 설계변경 요청 건

- 유진파워텍㈜ 20-04-026(2020.4.27.)

□ 공사개요

❍ 공 사 명 : 염곡지하차도 조명 개선공사

❍ 공사개요

등기구 철거 : NH 250W×596등

등기구 설치 : LED 100W×72등, LED150W×424등

❍ 도 급 자 :********************

❍ 공사기간 : 2020. 3.13 ~ 2020. 5.21

❍ 도 급 액 : ************

□ 설계변경 내용

❍ 소화기 표시등 설치에 따른 신규공종 발생

❍ 공사완료에 따른 제경비 정산(4대보험 및 안전관리비)

❍ 설계변경 금액

구분	당초 계약금액	변경 계약금액	증, 감액	비고
도급비	**********	**********	********

□ 보고자 검토의견

❍ 염곡지하차도 조명 개선공사 설계변경 검토결과

- 소화기표시등 설치 신규공종 내역 반영 하였으며,

- 공사 제경비 실제 정산내역을 설계변경에 반영하였으며,

- 제비율 검증결과 설계변경 내역에 이상 없음.

❍ 검토결과 설계변경 함이 적정하므로 위 사항을 반영하여 설계변경 하여 관리단속과에 변경계약 의뢰코자 함.

□ 향후계획

❍ 2020. 4. 29. 설계변경 의뢰(기전과→관리단속과)

❍ 2020. 5. 04. 공사준공

붙임 : 1. 설계변경내역서 1부.

2. 설계변경 요청 공문 1부.  끝.