투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	교통안전시설물(노면표시) 원인자 부담공사 연장 2차 승인 통보(서울항동공공주택지구)

1. 도시조정부-2245호(2020.4.29.)와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 서울항동 공공택지지구 교통안전시설 원인자 부담공사에 대하여 공사기간 변경 승인 요청에 대하여 아래와 같이 2차 승인하니 관련 시방기준을 준수하여 공사 시행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 건    명 : 항동지구 교통안전시설물(노면표시) 개선공사

나. 위    치 : 구로구 항동 177-3 일원

다. 연기사유 : 택지조성공사 진행에 따른 일부 미완료구간 구간 마무리

라. 검토결과 : 공사기간 변경 승인

설계사	감리사	시공사	공사기간 변경
			당초	변경
도로교통공단	도로교통공단	㈜창희이엔에스	승인일 ~ ‘20.4.30	승인일 ~ ‘20.05.30.

마. 공사승인조건

1) 준공 전 tgis.seoul.go.kr에 시공사항 자료 입력 완료 후 준공

- 공사번호 : 2019-0207-015

2) 공사 완료후 감리 준공검사조서를 첨부하여 우리사업소에 제출

3) 휘도 및 두께 측정과 관련하여 측정일시, 측정지점 위치도(측정지점을 위치도

에 표시), 측정사진 반드시 첨부

4) 서울시 노면표시 개정 시방 규정 적용. 끝

	서울특별시 강서도로사업소장
수신자	서울주택도시공사 사장,(도시조성부)
★주무관	주영진		도로보수과장	04/29 代정회곤
협조자
시행	도로보수과-4030	(		)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237 (마곡동) 1층 도로보수과	/
전화	02-2657-7951	/전송	02-2657-7950	/	ejooyjin@seoul.go.kr	/	대시민공개