투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	실정보고 승인 및 현장관리 철저

1.한강제2020-16호(2020.4.27) 관련하여 실정보고건에 대하여 검토하고 아래와 같이 승인 하오니 불법매립등이 발생치 않도록 관리에 철저를 기하기 바라며,

2.아울러 맑은 날씨가 계속되어 한강공원 이용 시민이 많아짐에 따라 현장주변 안전관리에 철저를 기하여 한건의 안전사고도 발생하지 않도록 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

□ 실정보고 검토회신 사항

실 정 보 고	회 신 내 용	비고
사토장변경 (수도권매립지 ⇒ 김포시하성면 마조리)	- 실정보고대로 승인 성수대교남단 비상계단 설치는 7월 공용이 가능하도록 공정관리에 철저를 기할 것 공사시행시 철저한 현장관리 및 품질관리로 향후 하자등 발생치 않도록 할것

끝.

	서울특별시한강사업본부장
수신자	(주)명남종합건설,금성이엔씨
주무관	김일문		기반시설과장	04/29 라철흠
협조자
시행	기반시설과-1446	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257	/
전화	02-3780-0674	/전송	02-3780-0744	/	kim751515@seoul.go.kr	/	대시민공개